위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기요청(영동6교 내진보강공사)

1. 교량안전과-14799호(2018.8.23.)와 관련입니다.

2. 우리 과에서 시행중인 “영동6교 내진보강공사”에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 내역

공 사 명	도 급 자	공사기간
		당 초	변 경
영동6교 내진보강공사	㈜풍양이엔씨	‘17.12.18∼‘18.8.31	‘17.12.18∼‘18.11.30

나. 지체상금 : 미부과

다. 연기사유 : 세부 사유 별도 연기의뢰서 붙임

라. 예산과목 : 교량관리, 일반교량관리, 교량시설물 내진보강공사, 시설비 및 부대비, 시설비(사고이월)

붙임 1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	정동익		교량관리팀장	유제천		교량안전과장	08/27 김종호
협조자
시행	교량안전과-14972	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가) 10층	/
전화	02-2133-8199	/전송	02-2133-0766	/	seestar7@seoul.go.kr	/	부분공개(5)