＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	배출수처리시설 운영관리용역 변경계약 시행

1. 정수과-7260(`18.8.23)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 배출수처리시설 운영관리 용역(장기계속)을 수행중인 용역근로자 정규직 전환여부 검토에 따라, 계약기간 및 계약금액 변경계약을 시행하여 운영관리에 만전을 기하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 암사 배출수처리시설 운영관리 용역(장기계속)

나. 용역기간 : 2015. 9. 1 ~ 2018. 8. 31

다. 총용역 부기금액 : 금1,248,599,000원(금차371,085,000원)

라. 계 약 자 :

- 태일환경관리(주) 전봉기

마. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 민간이전, 민간위탁금

바. 변경계약 내역

- 계약기간 : 3개월 연장

· 총차 : 2015. 9. 1 ~ 2018. 8. 31 → 2015. 9. 1 ~ 2018. 11. 30

· 금차 : 2018. 1. 1 ~ 2018. 8. 31 → 2018. 1. 1 ~ 2018. 11. 30

- 계약 금액 변경

구 분		당 초	변 경	변동사항	비 고
총계약부기금액		1,248,599,000	1,387,727,000	증139,128,000
차수별	2018년	371,085,000	510,213,000	증139,128,000
	2017년	471,339,000	471,339,000	변동없음
	2016년	304,546,000	304,546,000	변동없음
	2015년	101,629,000	101,629,000	변동없음

첨 부 : 1. 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

주무관	안영환		정수과장	하은경		암사아리수정수센터소장	08/24 가길현
협조자	주무관	이은숙		주무관	변민용
시행	정수과-7305	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	3146-5742	/전송	3146-5707	/	gory303@seoul.go.kr	/	부분공개(5)