투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	준공기한 연기에 따른 계약 기간 변경 의뢰(한강공원 자전거도로 개선)

1.우리과에서 추진하고 있는 「한강공원 자전거도로 개선공사」를 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 공 사 명 : 한강공원 자전거도로 개선공사

○ 위    치 : 한강공원 자전거도로 잠원수영장 등 6개소

○ 공사기간 : 2018. 3. 9 ~ 8.30

○ 규    모 : 경계석 설치 2,280m, 아스콘 포장 398a, 차선도색 7,900m 등

******************

******************

2. 준공기한 연기

○ 연기사유 : 폭염에 따른 아스팔트 포장 작업 중지로 추가 공사기간 소요

○ 용역기간 변경

- 당 초 : 2018. 3. 9 ~ 2018. 8. 30

- 변 경 : 2018. 3. 9 ~ 2018. 9. 20

붙  임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서  1부.

2. 준공기한 연기보고서  1부.   끝.

	시설관리과장
주무관	김영후		시설관리과장	08/24 한흥태
협조자
시행	시설관리과-2201	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02)3780-0643	/전송	02)3780-0744	/	kyhoo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)