문서번호	방재시설부-11087
결재일자	2018.8.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	공원시설과장	방재시설부장		시설국장
권지현	오춘섭	이임섭		08/27 이택근
협 조
	주무관		김자환

『경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계)』

설계변경(전체 6회,2차 4회) 및 준공(정산) 보고

2018. 8

도시기반시설본부

(방재시설부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계)』

설계변경(전체6회,2차 4회) 및 준공(정산) 보고

「경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계)」설계변경(전체 6회, 2차 4회) 및 정산(준공)보고 임.

[‣관련공문 : PSC-2018-735(2018.8.24.)]

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업 관리용역(2,3단계)

○ 용역내용

- 경춘철교 정비(L=176.5m)

- 2단계 구간 : 경춘철교 ~ 산업대3길 고가철교(L=1.1㎞)

- 3단계 구간 : 육사삼거리 ~ 서울시계(L=2.5㎞)

○ 용역기간 : 2015. 4. 13 ~ 2018. 8. 31 (2차 : ‘16.8.1. ~ ’18.8.31.)

○ 용 역 비 : *******************************

○ 용 역 사 : ㈜선진엔지니어링, ㈜수성엔지니어링, ㈜진전기엔지니어링

Ⅱ		설계변경 검토

○ 설계변경 내용

- 조경 분야 건설사업관리기술자의 현장배치 조정에 따른 정산(4개월)

- 2017.12월 계약변경 당시 전기분야의 용역기간 증가를 예상하여 예비비 확보하였으나 용역기간 증가가 없으므로 예비비를 감하여 정산(4.9개월)

○ 주요변경 내용(전체 6회, 금회 2차 4회 변경)

구 분	단위	당초	변경	증 ․ 감	비 고
건설사업관리기술자 배치	인·일	*****	*****	*****
계약금액 변경현황	천원	*********	*********	**********
용역기간	개월	**	*	****

○ 용역금액 변경

- 전체분

(금액단위 : 천원)

항 목	단위	당 초		변 경		증 ․ △감		비고
		수량	금액	수량	금액	수량	금액
직접인건비	인․일	*****	*******	*****	*******	****	*******
2. 제경비	식	*	*******	*	*******	*	*******
3. 기술료	식	*	*******	*	*******	*	*******
4. 직접경비	식	*	*******	*	*******	*	********
(1) 차량비	개월	**	******	**	******	******	********
(2) 자문비	인	**	*****	**	*****	*	*
(3) 여사무원	개월	**	*******	**	*******	*	*
(4) 도서인쇄비	식	*	*****	*	*****	*	*
(5) 백서제작	식	*	******	*	******	*	*
5. 산출금액	식	*	*********	*	*********	*	*******
6. 손해배상보험	식	*	*****	*	*****	*	********
7. 물가변동	식	*	******	*	******	*	*
8. 부가가치세	식	*	*******	*	*******	*	*******
9. 도급액			*********		*********		********

- 2차분

(금액단위 : 천원)

항 목	단위	당 초		변 경		증 ․ △감		비고
		수량	금액	수량	금액	수량	금액
1. 직접인건비	인․일	*****	*******	*****	*******	****	*******
2. 제경비	식	*	*******	*	*******	*	*******
3. 기술료	식	*	*******	*	*******	*	*******
4. 직접경비	식	*	*******	*	*******	*	********
(1) 차량비	개월	**	******	**	******	****	********
(2) 자문비	인	*	*	*	*	*	*
(3) 여사무원	개월	**	******	**	******	*	*
(4) 도서인쇄비	식	*	*****	*	*****	*	*
(5) 백서제작	식	*	******	*	******	*	*
5. 산출금액	식	*	*********	*	*******	*	*******
6. 손해배상보험	식	*	*****	*	*****	*	*******
7. 물가변동	식	*	******	*	******	*	*
8. 부가가치세	식	*	*******	*	******	*	*******
9. 도급액			*********		*********		********

○ 검토의견

- 경춘선 공사 준공에 따른 분야별 건설관리기술자의 현장배치 조정에 따른 책임건설사업 관리기술자의 설계변경 요청사항이 적정하다고 판단됨.

Ⅲ		조치의견

○ 위 검토내용과 같이 설계변경하여 변경계약하고 정산(준공)처리 하고자 함.

붙 임 : 관련 공문 1부.  끝.