문서번호	도시철도설비부-8190
결재일자	2018.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
이재돈	강치석	08/28 구자훈

9호선 3단계 영업시운전 결과 보고

[8.27.(월)]

2018. 8.27.

서울시도시기반시설본부

(도시철도설비부)

도시철도 9호선 3단계 영업시운전 일일 결과 보고

국토교통부(철도시설안전과-2199호,´18. 8. 7.), 한국교통안전공단

(철도기술처-1194호,´18. 6.26) 및 철도종합시험운행 시행 지침에 의거 9호선

3단계 영업시운전을 실시하고, 결과를 보고 드림.

Ⅰ		시 험 개 요

▢ 관련법령 : 철도종합시험운행 시행지침 제14조

▢ 시험기간 : ´18. 8.11. ~ ´18.10. 1(52일간, 휴일 없음)

▢ 운전시간 : 09:00 ~ 18:00

▢ 시험차량 : - 평 일 : 4량 2편성, 6량 2편성(3회 왕복)

- 토·일 : 4량 2편성,  6량 1편성(3회 왕복)

▢ 시 험 자 : 철도시설관리자 +  철도운영자

- 철도시설관리자 : 서울시도시기반시설본부 분야별 담당 주무관

- 철도운영자 : 서울교통공사[서울메트로9호선운영(주)]

▢ 시험방법 : 국토교통부에 제출한 종합시험운행 시행계획

[영업시운전 절차서]에 따라 시험자가 시행

- 한국교통안전공단에서 필요시 서울시에 사전 통보하고 입회

▢ 영업시운전 내용

계	운 전	영 업	비 고
31	11	20

▢ 추진일정

영업시운전		시험결과 검토		시정(개선)명령통보
´18.8.11~10. 1	⇨	´18.10.1~10. 5	⇨	´18.10. 8	⇨
서울시		한국교통안전공단		국토교통부
조치계획 수립		조치완료 확인		영업시운전(개통)
´18.10.10	⇨	´18.10.12	⇨	´18.10월말
서울시		한국교통안전공단		서울교통공사

Ⅱ		시 험 결 과

▢ 시운전시간 [2018. 8.27. 월]

1단계 관제센터 통제		시운전 시간
급 전	단 전
10 : 59	15 : 37	11 : 20 ∼ 15 : 30

▢ 터널내 안전점검 : 이상없음(해당공구 책임감리원, 현장대리인)

▢ 시운전 전동차

○ 시험열차: 4편성

- 1단계 운영사 : 2편성(4량 열차)

- 2단계 운영사 : 2편성(6량 열차)

▢ 시험내용

일자	분 야	점검내용	비 고
8.27	신 호	CO-04 열차정보 – CTC와의 열차운행관련 정보 송,수신 점검	931~938
	차 량	CO-08 기타영업서비스 준비사항점검 – 열차내 비품공급체계 점검
	통 신	CO-08 기타영업서비스 준비사항점검 – 여행정보안내기, TV, 전화 등 편의설비 적정배치	931,932

▢ 본선 출입승인

일 자	업체명	요청자	작 업 내 용
8.27	삼성물산	정찬욱	932정거장~933정거장 상,하선 승강장 종합안내도 전원 배관/배선
8.27	롯데건설(주)	강유성	920공구 터널 전구간 터널 조명 설치
8.27	KT_한국전파기지국	전명호	932, 933 본선터널 KT 이동통신 구축
	KT_한국전파기지국	전명호	931, 932, 933 본선터널구간 KT 이동통신 구축
	한국전파기지국(주)	손현기	935~937 본선터널 KT이동통신망 구축공사
	서울메트로9호선운영	정지호	937~938 본선터널 토목,궤도시설물 점검
	삼성물산	김준철	931S1환기구~932정거장~933정거장 터널정비
	㈜호승이앤씨	김성국	918공구 ~ 920공구 터널 유지관리 계측 점검
	㈜산강이엔씨	김천수	922공구 정거장 및 터널 유지관리 계측기점검
	서울메트로9호선운영	석보윤	938정거장 ~ 종점 터널 상하선 통신전자분야 자체점검
	현대정보기술	남완주	936역 선로변 궤도회로(F9190T) 점검
8.28	현대정보기술	남완주	931역 신호기계실 연동장치 점검

▢ 영업시운전 장애사항 현황

정거장	분 야	장애사항	비 고
931		-
932		-
933		-
934		-
935		-
936	신호분야	936역 하선 37.6km, F9190T 궤도회로 부정낙하 → 18. 8.27(월) 단전후 점검중
937		-
938		-

▢ 명일계획

○ 시운전시간 : 2018. 8.28.(화) 09시 ~ 16시

○ 시운전 열차 : 4량 2편성, 6량 2편성

○ 시운전내용

일자	분 야	점검내용
8.28	승 무	OP-01 운전시간 – 역 구간별 운행시분
	궤 도	CO-02 여객 승강차 – 열차 정지표지 설치 확인 및 위치조정
	통 신	CO-08 기타영업서비스 준비사항점검 – 여행정보안내기, TV, 전화 등 편의설비 적정배치

끝.