투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주)펨코엔지니어링건축사사무소 책임건설사업관리기술자 귀하
(경유)
제목	2차 실정보고 승인 및 공정관리 철저 알림 **************************

1. PC18(시립요양원)-106호(2018. 8. 17.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행하는「시립중랑노인전문요양원 증축공사」와 관련 책임건설사업관리  기술자로부터 제출된 공사부지 내 가연성 지중매립폐기물 발생 2차 실정보고 검토결과 수량정산 및 처리방법 변경을 승인하오니, 공정관리 철저, 품질 · 시공 및 안전관리 등 계약이행에 만전을 기하시기 바랍니다.

○ 변경 내용(매립 폐기물 처리비용(폐섬유) - **************

(단위: 톤, 원)

공 종	규 격	수량	공사원가	공급가액	부가세	계	비고
********	*****	*****	**********	**********	*********	**********	*** *** *** ****
*						**********

3. 아울러, 계약금액 조정은 우리 본부 설계변경 절차 등에 따라 처리예정임을 알려드립니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	문성재		의료시설과장	이형재		건축부장	전결 08/28 임인구
협조자
시행	건축부-12163	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어 플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2616	/전송	02-3708-2659	/	msj2061@seoul.go.kr	/	부분공개(5)