문서번호	설비부-11916
결재일자	2018.8.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장
김현욱	유병기	08/28 권오식

『남부도로사업소 청사 신축 전기공사』

준공기한 연기 검토 보고

2018. 8.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『남부도로사업소 청사 신축 전기공사』

준공기한 연기 검토 보고

「남부도로사업소 청사 신축 전기공사」준공기한을 선행 공정(토목 및 건축공사)에 맞게 연장하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

삼우(도시기반) 제18-0823호(2018.08.23.), 계약기간 변경 검토 보고

Ⅱ		공사개요

공 사 명 :『남부도로사업소 청사 신축 전기공사』

공사위치 : 서울시 금천구 시흥3동 963-1 외 13필지

공사기간 : 총차 `17.11.09. ~ `19.05.08(1차 `17.11.09. ~ `18.08.31.)

공사규모 : 지하1층/지상5층(연면적 5,361㎡)

공사내용 : 수전용량 500KVA(업무시설 300KVA, 주민편의시설 200KVA),                  태양광발전장치 50KW, 비상발전기 200KW 설치 등

도 급 비 : (총차) 1,029백만원, (1차) 41백만원

시 공 사 : ㈜성제전기 대표 김팔성

감 리 사 : ㈜삼우공간건축사사무소

[위 치 도]	[조 감 도]

Ⅲ		검토내용

준공기한 연장 사유

□ 선행공정(토목 및 건축공사) 지연에 따른 준공기한 연장

준공기한 연장 내용

구 분	차 수	준 공 기 한		비고
		당 초	변 경
계약기간	(총차)	2017.11.09. ~ 2019.05.08.	2017.11.09. ~ 2019.05.08.	(1차) 133일 증
	(1차)	2017.11.09. ~ 2018.08.31.	2017.11.09. ~ 2018.12.31.
계약금액	(총차)	1,028,152,705원	1,028,152,705원	변동없음
	(1차)	41,000,000원	41,000,000원

감리단 검토의견

□ 남부도로사업소 청사 신축 전기공사 계약기간 변경 요청을 검토한 결과 전기공사 업체에서 요청한 전기공사 계약기간 변경은 적합한 것으로 사료됨.

Ⅳ		검토의견

책임 건설사업관리기술자 검토 의견과 같이 전기공사 준공기간을 연기하여       총무부에 변경계약을 의뢰하고자 함.

지체상금 부과 : 미부과.

붙임  감리단 공문 1부.  끝.