문서번호	공간정보담당관-8375
결재일자	2018.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보기획팀장	공간정보담당관
최지혜		서미연	08/28 최영창
협조

2018년 항공사진 DB구축 및 기능개선 사업 주간업무(8월4주) 및 월간업무보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
공간정보담당관-1154(2018.2.1.)				300,000천원

2018. 8.

공간정보담당관

2018년 항공사진 DB구축 및 기능개선 사업

주간업무(8월4주) 및 월간업무보고

사업명			2018년 항공사진 DB구축 및 기능개선 사업
사업기간			‘18.6.12.~‘18.12.31.	담 당		공간정보담당관 최지혜
사업비			300,000천원	업체/PM		삼아항업㈜ 컨소시엄 마성진 차장
보고기간			‘18.8.20.~‘18.8.24.	전체공정율		계획 27.34% / 실시 27.34%
주요내용			1. 2018년도 촬영 항공사진 영상 자료분석 2. 정확도 개선 사진기준점측량(’81년 2차 진행중) 3. 항공사진 발전방향 연구 4. 항공사진 서비스 정확도가 개선된 사진(OrthoPhoto) 제작
업무구분	이 번 주 실 적 (2018.08.20 ~ 2018.08.24.)				다 음 주 계 획 (2018.08.27 ~ 2018.08.31.)
사업 관리	1. 항공사진 발전방향 연구 착수 협의 - 연구보고서 목차(안) 구성 협의 2. 정확도가 개선된 사진(OrthoPhoto) 시스템 반영 일정 협의 - TEST 영상 제작 직후 반영 3. 디지털 국토 엑스포 홍보지원 - 판넬, 리플렛 제작				1. 항공사진 발전방향 연구 착수 협의 - 관련 내용별 현황 분석 2. 정확도가 개선된 사진(OrthoPhoto) 시스템 반영 일정 협의 3. 디지털 국토 엑스포 홍보지원 4. 일자리 사업 착수 준비
DB 구축	1. 2018년도 촬영 항공사진 확인 - 파일이상 유무 및 파일 매수 확인 : 총 1929매				1. 2018년 항공사진 촬영 영상 자료분석
위장 처리	과거년도 항공사진 기무사 보안처리 - 전체 일정: 검수포함 10월 12일 완료 예정 76회차(2006년2차) : 62.5% 진행중 80회차(2010년) : 69.2% 진행중 82회차(2012년) : 60% 진행중 - 기무사 보안처리 완료본 내부 검수 및 보완 78회차(2008년), 83회차(2013년)				1.과거년도 항공사진 기무사 보안처리 - 76회차(2006년2차) : 8월 31일 완료 예정 - 80회차(2010년) : 8월 31일 완료 예정 - 82회차(2012년) : 9월 3일 완료 예정 2. 기무사 보안처리 완료본 내부 검수 - 육안검수 진행
정확도 개선	1. 1981년 2차 사진기준점측량 90%진행 2. 1982년 1차 - 정확도가 개선된 사진(OrthoPhoto) 제작				1. 1981년 2차 사진기준점측량 완료 2. 1982년 1차 - 정확도가 개선된 사진(OrthoPhoto) 확인 및 인계 3. 1988년 2차 항공사진 영상 분석 및 확인
S/W 개발	1. 항공사진 업무용서비스 문자알림 - 알림수신 설정 (완료) - 항공사진 신청시 신청자 문자발송 (완료)				1. 항공사진 업무용서비스 문자알림 기능 개발 항공사진 신청 시 담당자 문자발송 항공사진 처리완료 시 문자 발송 2. 테스트 진행