투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	화학물질관리법 취급시설 검사 관련 공사 협조 요청 및 회의개최

1. 근거: 운영과-6122(2018.8.24.)『화학물질관리법 취급시설 검사 대비 조치계획』

2. 화학물질관리법 지정검사기관에서 실시하하는 화학물질 취급시설 설치검사에 대해 적합 판정을 받을 수 있도록 대비 조치를 하고자 하오니 아래와 같이 공사 협조를 요청합니다.

가. 취급시설 설치검사 조치사항 내역

No	위치	취급시설 설치검사 조치사항	설치예시
1	· 종합탈취동 · 고도처리장 · 생화학탈취동	가성소다(고체) 보관창고 설치 · 지면에서 처마까지 높이 3m 미만 3개소(7m×10m, 4m×4m, 2.5m×2.5m) · 벽, 기둥은 내화구조 · 천장은 난연재료 또는 불연재료 · 창 및 출입구 유리는 망입유리 · 출입구는 방화문, 환기구, 경계표지 설치 · 조명설비 방폭등, 전선은 내화·내열성 · 스위치는 바깥에 설치 · 전기설비는 기준준수 및 검사확인증 발급 · 잠금장치(출입문, 창문)
2	TMS실	· 바닥은 에폭시 코팅 · 유해화학물질 누액받이 · 유해화학물질 전용 보관 캐비넷
3	실험실	· 흄후드설치 · 유해화학물질 전용 보관 캐비넷
4	공통사항	· 바닥은 에폭시 코팅 · 방재장비함, 방재설비, 개인보호구 · 비상 샤워시설

나. 소요예산 : 180,000천원

1) 2018년도에 배정된 예산이 없으므로 낙찰차액을 사용

2) 2018년도에 진행하지 않는 사업예산 사용

다. 협조 요청사항

1) 취급시설 관련 설치검사 설계 및 공사시 장외영향평가 용역(운영과)과 협조하여 화학물질관리법에서 규정한 법적 기준을 준수하여 시공할 수 있도록 협조 요청

2) 2018년 10월 말 지정기관으로 부터 취급시설 설치 검사를 받을 수 있도록 10월 중순 까지 공사 완료 협조 요청

라. 담당자 회의 개최

1) 일시 : 2018. 8. 31(금) 14:00

2) 장소 : 본관 3층 회의실

3) 참석자 : 취급시설 공사관련 담당자(관리과, 보수과, 운영과)

4) 내용 : 우리센터의 화학물질관리법 위반 자진신고에 따른 후속 조치로 2018년 12월 까지 원활히 영업허가 절차를 이행 할 수 있도록 각 분야별 공사 담당 지정 및 업무분장 협의

붙임  화학물질관리법 취급시설 검사 대비 조치계획 1부.  끝.

	운영과장
수신자	관리과장,시설보수과장
주무관	류의창		운영과장	08/29 최영효
협조자
시행	운영과-6216	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 운영과 (용답동, 중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2582	/전송	02-2211-2599	/	ryuui@seoul.go.kr	/	대시민공개