문서번호	설비부-12050
결재일자	2018.8.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	08/29 권오식
협조

『남산예장자락 재생사업 전기공사, 통신공사』

준공기한 연기 검토보고

2018. 08.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 전기공사, 통신공사』

준공기한 연기 검토보고

『남산예장자락 재생사업』선행공정(토목) 준공기한 연기에 따라 전기공사, 통신공사 준공기한 연기하고자 함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 남산예장자락 재생사업 전기공사, 통신공사

□  규    모 : 지상 공원조성(16,373m2), 지하 주차장(16,992m2)

□  공사기간 : 2017.08.01.~2019.01.31

□  공사비(전기·통신) : ************************

□  감 리 사 : ㈜동성엔지니어링

□  시 공 사 : **************************

□  공정율 : 10%(소방재난본부 지하층 리모델링 진행)

2		관련근거

□  남산예장-275호(2018.8.24.) : 통신공사 준공기한 연기 검토보고

□  남산예장-276호(2018.8.24.) : 전기공사 준공기한 연기 검토보고

3		준공기한 연기내용

□  계약현황(도급)

공사구분	계약금액(총차)	계 약 자	준공기한(총차)
			당 초	변 경
전기공사	**************	*********	`19.01.31	`19.12.31
통신공사	************	*******	`19.01.31	`19.12.31

□  연기사유 : 선행공종(토목) 공사기간 연장(`19.02.27→`19.12.31)에                   따른 준공기한 연기

□  귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

4		보고자 의견

□  선행공종(토목) 공사기간 연장에 따라 전기공사 및 통신공사 준공기한 연기하는 것이 타당하므로 계약부서에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙 임 : 감리단 공문 2부. 끝.