문서번호	버스정책과-23207
결재일자	2018.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정류소관리팀장	버스정책과장
이오수		이상학	08/29 오희선
협조

남산1호 터널 앞 버스정류소 설치공사 설계변경 및 준공기한(3차) 연기

2018. 8

버스정책과

남산1호 터널 앞 버스정류소 설치공사

설계변경 및 준공기한 (3차)연기

「남산1호 터널앞 버스정류소 설치공사」와 관련 계측 관리기간 연장에 따른 설계변경과 전기공사 추가 등 여건변화에 따른 절대 공사기간이 부족하여 3차 준공기한을 연기하고자 함.

1	준공기한 연기 대상사업

□ 사업건명 : 남산1호 터널앞 버스정류소 설치공사 및 용역

□ 연기대상 : 본공사, 계측관리, 폐기물처리용역

□ 계약내역 : 총 3 건

계 약 건 명	계약자	계약금액(원)	공사기간
남산1호 터널앞 버스정류소 설치공사	에스케이피건설 ㈜	￦473,749,660	2017.12.21.~2018.08.30
남산1호 터널앞 버스정류소 설치공사 폐기물처리 용역	㈜수도권환경	￦11,070,000	2017.12.11.~2018.08.30
남산1호 터널앞 버스정류소 설치공사 계측관리 용역	㈜호승이앤씨	￦15,500,000	2017.12.01.~2018.08.30

2	준공기한 연기사유

□ 연기사유 : 공사구간내 가로등 3주 이설 및 역L형 옹벽구조물 20m 연장(75⇒95m)에 따른 절대공기가 부족하여 준공기한을 일괄 연기하고자 함

□ 연기기한 : 준공일자 2018. 11. 30 (총 92일)

3	준공기한 연기내역

□ 계약건별 준공기한 연기

계 약 건 명	준공기한 연기		연기 일수	귀책 사유
	당 초	변 경
남산1호 터널앞 버스정류소 설치공사	2017.12.21.~2018.08.30	2017.12.21.~2018.11.30	92일	우리시
남산1호 터널앞 버스정류소 설치공사 폐기물처리 용역	2017.12.11.~2018.08.30	2017.12.11.~2018.11.30	92일	상 동
남산1호 터널앞 버스정류소 설치공사 계측관리 용역	2017.12.01.~2018.08.30	2017.12.01.~2018.11.30	92일	상 동

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

4	계측관리 용역 설계변경

〇 변경사유 : 본공사 연장에 따른 계측 관리기간 추가소요

〇 변경내역 : 계측기간 90일→150일 (60일 추가)소요

〇 용역금액 : 당초 15,500천원→20,000천원 (4,500천원 증액)

〇 산출근거 : 계측분석 추가 인건비 반영( 붙임 산출내역 참조).

5	후속 조치계획

〇 2018. 8월중 : 업체 준공기한 연기통보 및 합의서 징취

〇 2018. 8월중 : 해당공사, 용역 준공기한 재무과 연기의뢰

〇 2018. 9월중 : 계측관리 용역 변경계약 체결

〇 2018.11월말 : 공사 및 용역 개별 준공처리.

붙임 : 준공기간 연기신청 및 계측관리용역 설계변경 내역 1부.  끝.