문서번호	조경과-4891
결재일자	2018.8.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	조경과장		관리부장		서울대공원장
이영선	代강금완		심상원		08/30 송천헌
협 조

「동물원내 어린이놀이터 재정비공사」실정사항 검토보고

2018. 8.

서울대공원

(조 경 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「동물원내 어린이놀이터 재정비공사」실정사항 검토보고

「동물원내 어린이놀이터 재정비공사」추진과 관련 실정사항에 대하여 검토하고 아래와 같이 조치하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 동물원내 어린이놀이터 재정비공사

○ 공사기간 : 2018. 6. 29 ~ 9. 26

○ 공사금액 ***************

************************************************

○ 도 급 자 : ***************

□ 실정사항 검토

구 분	현 황	검 토 내 용	비 고
철거공	○ 기존 놀이터 철거공종 중 고무칩 포장 하부에 콘크리트 기층이 계획물량(T100)보다 두껍게(T300) 포장됨	○ 철거 및 처리 조치 ※ 폐기물처리용역 물량정산 병행
식재공	○ 목계단쪽 당초 사철나무(H1.0*W0.3)으로 계획되었으나, 수종 변경	○ 수관폭이 치밀한 화살나무(H1.0*W0.6) 으로 대체 식재
	○ 설계에 미포함된 미끄럼틀 하부 경사면 토사유출방지 필요	○ 미끄럼틀 하부 맥문동 식재
기 타	○ 경계석 설치부 지하매설물(전기, 통신케이블)이 산재되어 경계석 시공 후 유지관리의 어려움	○ 점토블럭 시공부로 지하매설부 이설

□ 현황사진

목계단 옆 급경사면	포장 하부 콘크리트

□ 처리계획

○ 위 검토내용과 같이 공사여건이 변경되었기에 본 사업의 시급성을 감안 우선 시공토록 조치하고 추후 설계변경 처리하고자 함

- 수목변경 및 지장물 이설에 따른 공사비와 폐기물처리비용은 본 공사 낙찰차액(약11백만원)을 활용하여 정산처리

끝.