투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시 서부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자 공사 협조요청(세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 공사)

1. 정림 역사문화18-611호(2018.08.24.)호 및 기전과-1910(2017.02.20.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 『세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 공사』현장 교통안전시설물 원인자 공사와 관련하여 아래와 같이 공사기간 변경을 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

-  아   래 -

가. 공 사 명 : 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 공사 전기공사.

나. 공사위치 : 서울시 중구 태평로1가 60-6일대

다. 공사기간

- 당      초 : 2017.2.20. ~ 2018.04.30.

- 변경요청일 : 2017.2.20. ~ 2018.10.30.

- 사      유 : 건축공사 공기연장으로 절대공기 부족.

라. 설계·감리사 : ㈜동림TNS

마. 시 공 사 : ㈜동일전기

따로붙임 1. 감리단 검토서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	곽용길		환경설비과장	08/30 여인웅
협조자
시행	설비부-12085	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8616	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	부분공개(5)