위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	문정도시개발구역 개발계획 변경 및 실시계획 변경인가 고시

1. 문정도시개발사업과 관련, 주택도시공사가 송파구를 경유하여 신청한 문정도시개발구역 개발계획 변경 및 실시계획 변경인가에 대하여 검토한 바, 업무단지 소유권이전을 위한 부분준공 추진 및 관련기관(부서) 협의사항을 반영하기 위하여,

2. 「도시개발법」 제4조, 제17조에 의거 개발계획 변경 및 실시계획 변경인가하고, 같은 법 제9조, 제18조에 의거 이를 고시하고자 합니다.

가. 개발계획 변경사항

구 분	기정		변경	변경사유
토지이용계획	1단계	2단계	합계	부분준공을 위한 공구분할은 토지이용계획 변경 사항이 아니므로 구분표시 삭제
	149,005.5	399,233.5	548,239.0
*****	******** *******		******** *******	**************************
사 업 기 간	2007.06.28.~2018.12.3.		2007.06.28.~2019.12.31	컬쳐밸리 조성 및 동남로 확장공사 등 잔여공사의 공사기간 확보를 위한 기간연장

나. 실시계획 변경사항

구 분		기정	변경				변경사유
사 업 기 간		2007.06.28.~ 2018.12.31.	· 2007.06.28.~ 2019.12.31. - 1공구 : 2007.06.28.~ 2017.05.18. - 2공구 : 2007.06.28.~ 2018.12.31. - 3공구 : 2007.06.28.~ 2019.12.31.				컬쳐밸리 조성 및 동남로 확장공사 등 잔여공사의 공사기간 확보를 위한 기간연장 및 부분준공을 위한 공구분할
- 토지이용계획 - 용도지역 도시계획시설		합계	합계	1공구	2공구	3공구	부분준공을 위한 공구분할에 따른 표시변경 토지이용계획 용도지역결정조서 도시계획시설 결정조서 등
		548,239,0	548,239,0	149,005.5	315,072.8	84,160.7
****** ********	*****	*	******** *****************************************************************************				**************************
	*****	*

붙임 : 1. 도시개발구역 개발계획 변경 및 실시계획 변경 검토보고 1부.

2. 고시문(안) 1부.  끝.

주무관	정종우		도시개발팀장	강창호		도시활성화과장	08/30 윤호중
협조자
시행	도시활성화과-9820	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 별관 2동2층 시설계획과	/
전화		/전송		/	asaravo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)