＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사현장 실정보고서 검토결과 통보

1. 공사감독2처-12098(2018.8.29.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에 승인 요청한 공사현장 실정보고서에 대해 다음과 같이 통보하오니 공사         시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 보고내용 및 검토결과

구분	공종	시설공단 보고 내용	우리사업소 검토 의견
1	기존관 연결부 관종 및 분기밸브, 기존 공기밸브 위치 변경 “1구간”	● 1구간 종점부의 분기부는 시공시 안전상의 문제로 확인굴착으로 확인된 기존관(PE 150㎜)에 연결 ● 1구간 관로 유지관리를 위해 밸브설치가 필요없는 종점부 분기밸브를 중간지점에 중간밸브(다용도)로 위치를 변경 시공 ● 1구간 신설관과 기존관이 연결되는 하수박스 하월부 부근 유로 방향 상류측에 공기밸브 이동 설치 ▶ 개략공사비 : 증)1,690천원	●『타당함』 ▶ “1구간” 기존관 연결부 관종 및 분기 밸브, 기존 공기밸브 위치 변경 시공
2	기존관 연결부 관종 변경 “2구간”	● 2구간 종점부의 분기부는 시공시 안전상의 문제로 확인굴착으로 확인된 기존관(PE 150㎜)에 연결	●『타당함』 ▶ “2구간” 기존관 연결부 관종 변경 시공
3	지하매설물로 인한 터파기 폭 및 심도 증가 “1~2구간”	● 1~2구간 중 일부 구간에 지하매설물로 인한 터파기 폭(2~4m) 및 심도(1.43~2.4m) 증가 ▶ 개략공사비 : 증)5,467천원	●『타당함』 ▶ “1~2구간” 지하매설물로 인한 터파기 폭 및 심도 증가에 따른 토공량 증가 분을 설계변경에 반영

끝.

	남부수도사업소장
주무관	김재엽		급수운영과장	08/30 代강동길
협조자
시행	급수운영과-17620	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4557	/전송	3146-4589	/	yeup2424@seoul.go.kr	/	대시민공개