투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(도로시설과장)
(경유)
제목	석촌지하차도 보수공사 배정잔액 재배정 요청

1. 우리사업소에서 시행하고 있는 “석촌지하차도 보수공사”와 관련입니다.

2. 본 사업은 노후된 시설물의 내구성 확보와 지하차도내 아스팔트 재포장 및 폭우시 원활한 배수처리를 위한 U형측구 단면확대 등을 시행하는 공사로써 아래와 같은 사유로 추가 소요예산을 재배정 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 석촌지하차도 보수공사

나. 공사개요

1) 아스팔트 포장(방수포함) 54a

2) 표면보수 1,243㎡

3) U형측구 단면확대 보수

다. 예산 재배정 요구액 : 50,356천원                   (단위:천원)

세부사업	예산액	기 재 배정액	배정 잔액	재배정 요구액	비고
석촌지하차도보수공사	628,000	577,644	50,356	50,356

라. 재배정 요청사유

사업계획 물량(당초 공사원가계산시) 대비 예산범위내 물량 (감)조정 발주로 미 발주 잔여물량 금회 반영시공

1) 지하차도 박스구간 바닥슬래브 방수 잔여물량 반영

(설계시 물량 2,850㎡ → 발주물량 1,950㎡)

2) 지하차도 U-Type구간 표면보수 잔여물량 반영시공

(설계시 물량 1,834㎡ → 발주물량 1,243㎡)

3) U형측구 단면확대 보수 잔여물량 반영

(설계시 물량 700㎡ → 발주물량 631㎡)

4) 기타 유공관 설치 등 1식

붙임 : 공사착수에 따른 현안사항(집행잔액 사용) 검토 방침서 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	나철흠		시설보수과장	04/30 김유찬
협조자
시행	시설보수과-1766	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0382	/전송	02-2040-0308	/	cheolna@seoul.go.kr	/	부분공개(5)