문서번호	도시철도계획부-3724
결재일자	2018.5.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		경전철설계과장	도시철도계획부장
이선우		강명석	05/02 김진팔
협조	경전철관리과장		정원영
	주무관		박준우

도시철도 시설물의 효율증대를 위한 정거장 및 기능실 최적화용역

설계변경 및 준공기한 연기 검토보고

2018. 05.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

도시철도 시설물의 효율증대를 위한 정거장 및 기능실 최적화 용역

설계변경 및 준공기한 연기 검토보고

「도시철도 시설물의 효율증대를 위한 정거장 및 기능실 최적화 용역」관련 “경전철 도시철도사업 설계·시공 및 시설물 개선방안” 추가업무에 따른 설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고임.

Ⅰ		용역개요

○ 용역명 : 도시철도 시설물의 효율증대를 위한 정거장 및 기능실 최적화 용역

○ 용역기간 : 2017. 03. 20. ∼ 2018. 05. 31.

○ 용 역 비 : 161,500천원

○ 용 역 사 : 주식회사 유신 대표이사 성낙일

Ⅱ		추진현황

○ ‘17.03.20. : 용역계약

○ ‘17.04.20. : 착수보고회 개최

○ ‘17.05.26. : 공정보고회 개최

○ ‘17.09.07. : 중간보고회 개최

○ ‘18.02.26. : 준공기한 연기 보고

Ⅲ		설계변경 및 준공기한 연기

○ 설계변경 및 연기 사유

- 경전철 도시철도사업 설계·시공 및 시설물 개선방안 추진을 위한 추가과업에          따라 설계변경 및 준공기한 연기

※ 본부장 방침 2018. 04. 06, 도시철도계획부-2907

○ 용역비 변경

(단위 : 원)

구분	당 초	변 경	증감	비고
용역비	161,500,000	211,500,000	증)50,000,000

○ 준공기한 연기

구분	당 초	변 경
용역기간	2017.03.20.∼2018.05.31.	2017.03.20.∼2018.07.31.

※ 연기 귀책소재 : 계약자 귀책사유 없음(지체상금 미부과)

Ⅳ		조치계획

○ 상기와 같이 도시철도사업 설계·시공 및 시설물 개선방안 추진을 위한 추가        과업에 따라 설계변경 및 준공기한을 연기하고자 함

○ 예산과목

- 도시철도건설, 도시철도건설사업, 지하철구조물내구성확보, 적산, 환기구유입          공기질기준수립용역, 시설비(설계비) : 161,500,000원(‘17사고이월)

- 행정운영경비(도시기반시설본부기획예산과), 기본경비(도시철도건설사업특별          회계), 기본경비(도시철도), 사무관리비 : 50,000,000원

붙임 : 1. 설계변경 요청서 1부.

2. 경전철 도시철도사업 설계·시공 및 시설물개번방안 추진 1부.

3. 설계변경 내역서 1부. 끝.