위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	변경계약 요청 (남산1호 터널 앞 버스정류소 설치공사 폐기물처리 용역)

1. 버스정책과-23207호(2018.8.29.)와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행중인 「남산1호 터널 앞 버스정류소 설치공사 폐기물처리 용역」에 대해 아래와 같이 계약 변경사항이 발생되어 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 남산1호 터널 앞 버스정류소 설치공사 폐기물처리 용역

나. 변경사항 : 대표자 명의변경 및 준공기한 연기

다. 변경계약 요청내역

구분	계약자	계약금액	준공기한
당 초	㈜수도권환경 대표 이병권	￦11,070,000	2017.12.11.~ 2018.8.30
변 경	㈜수도권환경 대표 차석구	변경사항 없음	2017.12.11.~ 2018.11.30

붙임 1. 설계변경 및 준공기한 연기방침서 1부.

2. 대표자 명의변경 신청서 1부.

3. 준공기한 연기 합의각서, 연기의뢰서 각1부.  끝.

	버스정책과장
★주무관	이오수		정류소관리팀장	이상학		버스정책과장	08/30 오희선
협조자	계약2팀장	代김희경
시행	버스정책과-23373	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사별관 1동 7층	/
전화	2133-2297	/전송	2133-1049	/	whrornfma@seoul.go.kr	/	부분공개(7)