문서번호	정수시설과-3737
결재일자	2018.8.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서광호		代최양교	08/31 김중영
협조
	주무관		최양교

[뚝도계통 도수관로 도복장 및 코팅공사]

설계변경(정산) 심의결과 보고

2018. 8.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

[뚝도계통 도수관로 도복장 및 코팅공사]

설계변경(정산) 심의결과 보고

뚝도계통 도수관로 도복장 및 코팅공사 시행 중 물량의 증·감에 대한 설계변경 심의를 실시하고 결과를 보고 드림.

1		사업현황

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 뚝도계통 도수관로 도복장 및 코팅공사

❍ 공 사 개 요

- 배관도복장 : 678㎡

- STS316L 파우더 코팅  : 43.8㎡

❍ 공 사 기 간 : 2018. 6. 14. ~ 2018. 9. 11.

❍ 계 약 금 액 : 128,072,030원

❍ 계약 상대자 : ㈜상일엔지니어링 대표 홍정호

2		설계변경심의 개최 현황

□ 개최현황

❍ 일    시 : 2018년 8월 31일(금) 10:00

❍ 장    소 : 정수시설과 회의실

❍ 참석인원 : 총 5명

- 위 원 장 : 정수시설과장 대직 공업6급 최양교

- 심의위원 : 시설6급 변병수, 공업6급 김현철, 공업6급 이극희, 공업6급 이진근

3		설계변경 세부내용 및 사유

□ 주요 변경 내역

❍ 4대보험(건강보험료,연금보험료,노인장기요양보험료) 정산서류 미제출

(전액 감액 조치)

❍ 지정폐기물 처리비 정산 감액 조치

□ 설계변경 금액내역

❍ 세부 물량 및 금액변경 사항 : 첨부 내역서 참조

❍ 변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	116,429,122	110,979,123	감)5,449,999
부가가치세	11,642,912	11,097,912	감)545,000
도급금액	128,072,034	122,077,035	감)5,994,999
결정금액	128,072,030	122,077,030	감)5,995,000

4		심의결과

□ 물량 증•감 공종 적정성 여부 : 적정

□ 단가적용 적정성 여부: 적정

□ 제비율 산정 및 요율의 적정성 여부 : 적정

5		조치의견

□ 상기 심의 결과를 반영하여 설계변경(정산) 시행하고자 함.

붙임 : 1. 설계변경 심의 의결서 1부.

2. 설계변경 심의요청서 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 제경비 검증확인서 1부.   끝.