위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	1종교량 보수보강공사 책임건설사업관리기술자
(경유)
제목	작업기간 연기요청에 대한 승인 통보(8차, 9차 작업요청)

1. 1종교량 제18-256호(2018. 8.29.) 및 제18-257호(2018. 8.29.)와 관련입니다.

2. 위 호로 작업기간 연기요청 검토 보고한 제8차 및 제9차 작업요청에 대하여 아래와 같이 승인하오니 공사장 안전관리 및 품질관리에 만전을 기하여 주시고, 공사 연기로 인하여 시민 불편이 발생하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

가. 승인내용

작업요청서	작업기간		작업내용	변경사유
	당초	변경
제8차	2018. 5.23. ~ 2018. 8.31.	2018. 5.23. ~ 2018. 9.19.	미끄럼방지 포장 외 12건	폭염 및 우천으로 인한 작업지연
제9차	2018. 5.23. ~ 2018. 8.30.	2018. 5.23. ~ 2018. 9.18.	서해안연결램프 정비 1건, 영등포역고가 정비 2건, 신정교 정비 6건	폭염 및 우천으로 인한 작업지연

.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	서성만		강남일반교량팀장	이홍재		교량안전과장	08/31 김종호
협조자	주무관	이노진		주무관	이회진
시행	교량안전과-15324	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개