투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	청계산지하차도 외 3개소 보수공사 설계변경(정산) 시행

우리 사업소에서 시행중인『청계산지하차도 외 3개소 보수공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 청계산지하차도 외 3개소 보수공사

나. 공사기간 : 2018. 03. 28. ~ 2018. 09. 27.

다. 도 급 자 : 우제이건설㈜  대표 김주연

라. 예산과목 : 도로시설과.도로시설관리,지하차도시설관리,청계산지하차도

외 3개소 보수,시설비 및 부대비,시설비

마. 설계변경 내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증.감		비고
총공사비		499,803,600	556,600,000	증)	56,796,400
도급비	공급가액	448,366,909	506,000,000	증)	57,633,091
	부가가치세	44836,691	50,600,000	증)	5,763,309
	계	493,203,600	556,600,000	증)	63,396,400
관급자재비		0	0		0
이 전 비		6,600,000	0	감)	6,600,000

따로붙임 :1. 설계변경 보고서 1부.

2. 변경 내역서 1부. 끝.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.

주무관	김부호		시설보수과장	임영철		동부도로사업소장	08/31 송만규
협조자
시행	시설보수과-3287	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0371	/전송	02-2040-0308	/	jam747@seoul.go.kr	/	대시민공개