문서번호	조경과-11650
결재일자	2018.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경협력팀장	조경과장
조현	유혜미	08/31 문길동

“2018 동네숲(골목길) 가꾸기사업”

예산 비목변경 요청에 따른 검토보고

2018. 8.

푸른도시국

(조 경 과)

“2018 동네숲(골목길) 가꾸기사업”

예산 비목변경 요청에 따른 검토보고

“2018 동네숲(골목길) 가꾸기사업” 추진과 관련 중구 필동 일대 골목길 녹화 추진에 따른 예산 비목간 변경요청 건이 있어 아래와 같이 검토, 보고드림.

Ⅰ				사 업 개 요

<중구>

사 업 명 : 문화가 빛나는 골목길

대 상 지 : 3개소

- 중구 삼일대로2길 ~ 퇴계로30길, 퇴계로 32길, 퇴계로34길

규    모 : 연장 557m, 녹지조성 3,342㎡

사 업 비 : 77백만원(보조금 70<경상 21, 자본 49>, 자부담 7)

사업내용 : 골목길 녹화

선정단체 : 재단법인 멍석

	※ 2018 동네숲(골목길) 가꾸기 사업개요
○ 대 상 지 : 종로구 누하동 등 12개소 ○ 규 모 : 연장 6,021m, 녹지조성 25,814㎡ ○ 사 업 비 : 816.1백만원(보조금 800<경상 240, 자본 560>, 자부담 16.1) ○ 사업내용 : 골목길 녹화 ○ 선정단체 : 11개 단체

Ⅱ				요 청 사 항

변경사유 : 골목길 녹화지 관수시설 신설

세부 변경사항

비 목 명	하위비목	변 경 전	변 경 후	비고
계		46,990천원	46,990천원	변경없음
시설공사비	시설공사비	-	9,654천원	증9,654천원
물품비	물품제조·구입비	37,290천원	30,590천원	감6,700천원
	전문인건비	9,700천원	6,746천원	감2,954천원

※ 자치단체자본보조 중 일부 변경사항(그 외 예산과목 변경 없음)이며, 총액변경 없음.

Ⅲ				검 토 결 과

: 예산 비목간 변경 승인

골목길 녹화지 주변에 관수시설이 없어 유지관리에 어려움이 있고, 현장여건에 따라 일부 물량증감이 있어 이를 조정함에 따른 예산 비목간 변경이 발생한 사항으로,

주민이 함께 꽃과 나무를 심고 가꾸는 활동을 통해 공동체 문화형성 및 활성화를 위한 사항으로 본 사업 취지에 부합함.

사업취지 및 “2018 동네숲(골목길) 가꾸기사업” 집행지침에 의거 검토한 바, 예산 비목간 변경요청 건이 타당함.

Ⅳ				향 후 계 획

검토결과 통보(시 → 중구)

붙 임 : 중구 공원녹지과-12194(2018.8.27.)호 공문 일건.  끝.