투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	하도급 변경 계약 알림(초안산 앞 보행교량 설치공사)-목재데크공사

우리 부에서 시행중인 『중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사』 하도급 변경계약 내역을 붙임과 같이 알려드리니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

1. 공사명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

2. 수급자 : 한양산업개발(주) 대표 이기욱

3. 하도급 계약 현황

공 종	하도급사	하도급 해당액		하도급액	비율(%)	계약기간		비 고 (검토결과)
목재데크공사	엘에스 빌드윈 ㈜	당초	408,826,000	335,500,000	82.06	당초	2017.12.20. ~2018.04.28.	적정
		변경	551,980,000	452,980,000	82.06	변경	2017.12.20. ~2018.11.30.
		증감	143,154,000	117,480,000	-	증감	-

붙  임 : 하도급 변경계약 관련서류(별도송부) 각 1부. 끝.

	토목부장
주무관	권해엽		교량건설과장	장종환		토목부장	08/31 김영수
협조자	주무관	김동현
시행	토목부-15203	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)