문서번호	기전과-8154
결재일자	2018.9.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김성균		전결 09/03 서수일
협조

2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기 공사(구YTN 앞)

실정보고사항(2차) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 8.

서부도로사업소

(기전과)

2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기 공사

(구YTN 앞)

실정보고사항(2차) 검토보고

2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기 공사(구YTN 앞) 시행 중 감리업체에서 제출한 실정보고(2차) 건에 대해 내용 검토 후 그 결과를 보고하고자 함

□ 관련근거

○ ‘서울남대문경찰서 교통과-3641(2018. 07. 25.)’

- 구YTN 앞 횡단보도 신설 및 교통신호기 설치에 따른 검토의견

: 인접 제어기 연등 요청

○ ‘기전과-6813(2018.07.25.)’

- 감리업체에 검토요청

○ ‘태영(신)2018-43(2018. 08. 09.)’

- 감리업체 실정보고(1차) 제출

○ ‘태영(신)2018-50(2018. 08. 30.)’

- 감리업체 실정보고(2차) 제출

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기 공사(구YTN 앞)

○ 공사 위치: 서울시 중구 세종대로 구YTN 앞

○ 공사 내용: 신호등, 지주, 신호케이블 신설 등

○ 계약 금액: ***********

○ 공사 기간: 2018. 7. 19.∼2018. 9. 16.

○ 계약 업체: ******************

○ 감리 업체: ******

□ 실정보고 내용

○ 변경 예상금액: ************

(단위: 원)

구 분	변 경 전	1차 변경후	2차 변경후	증․감
공 급 가 액	**********	**********	**********	***********
부가가치세	*********	*********	*********	*********
총 공 사 비	**********	**********	**********	***********

○ 세부내역

- 구YTN 앞: ************

․ 남대문경찰서 요청사항: 제어기 신설 대신 인접한 제어기와 연등 요청

․ 제어기 연등에 따라 굴착 구간 증가(차도: 약 40m, 보도: 약 30m)

․ 주요 변경 내용

시공(공종 및 물량) 내용	규격	단위	수량
			당초	변경 (1차)	변경 (2차)	증·감
제어기 완성품(표준형)	LSU 6EA	대	1	0	0	-1
신호케이블	지중 7선	m	5	62	68	63
전원선	지중 1선	m	28	0	0	-28
전선관 배관	PE Φ54mm 1열	m	31	13	13	-18
전선관 배관	PE Φ100mm 2열	m	0	18	18	18
후강전선관 배관(야간)	Φ104mm×3.6m(KSC 8401) 2열	m	38	75	81	43
아스팔트 횡단굴착(야간)	기계 80% + 인력 20%, B=1.2M 2열 배관	m	35	72	78	43

□ 조치의견

○ 감리업체에서 제출한 실정보고 검토결과 그 내용이 타당하여, 감리업체에 실정보고 내용에 따라 작업 시행토록 지시하고 추후 정산하고자 함

붙임  1. 공사 시행 전 검토의견 회신(남대문경찰서→사업소) 1부.

2. 공사 시행 전 검토요청(사업소→감리업체) 1부.

3. 감리업체 실정보고서(1차) 1부.

4. 실정보고사항(1차) 검토보고 1부.

5. 감리업체 실정보고서(2차) 1부.  끝.