문서번호	기전과-7623
결재일자	2018.9.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
박태진		송장현	09/03 김용제
협조
	관리단속과장		김상두

- 터널 및 지하차도 통합관제시스템 설치를 위한 -

사업소 당직실(가설건축물) 확장 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 09.

강서도로사업소

(기전과)

- 터널 및 지하차도 통합관제시스템 설치를 위한 -

사업소 당직실(가설건축물) 확장 추진계획

터널 및 지하차도 기전시설물 통합관제시스템 설치를 위한 사업소 당직실(가설건축물) 확장 추진계획을 보고 드림.

□ 추진근거

◯ 터널 및 지하차도 통합관제시스템 확충 계획

【기전과-7467(2018.8.29.)】

□ 건축물 현황

◯ 대지위치 : *************************

◯ 규    모 : **************

◯ 구    조 : 샌드위치 판넬 (가설건축물)

◯ 용    도 : 공공업무시설 (당직실용)

□ 당직실 확장 계획

◯ 대상건물 : 사업소 당직실(가설건축물)

◯ 확장규모 : *************

◯ 확장용도 : 도로 기전시설물 통합관제시스템 설치공간으로 활용

◯ 소요예산 : *********

- ***********************

- **********************

◯ 사업기간 : 2018. 9. ~ 2018. 12.

◯ 현장사진

확장 공간 (정면)	확장 공간 (측면)

□ 세부 추진계획

◯ 설   계 : 실시설계 용역 발주

― 용역발주사유

• 본 가설건축물 확장은 건축법 제23조(건축물의 설계) 등 관련법규에 의거 반드시 건축사가 설계해야 할 사항은 아니지만, 기존 건축물의 내부 견고성 검토, 증축바닥의 토목공사 시공 등 전문성 및 기술력이 필요한 사항이며, 사업소내 건축직 기술인력의 부재 등으로 전문업체에 설계용역을 의뢰하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

― 용역 소요예산 : ********

•  ******************************

•  예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물

일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

― 계약방법 : 수의계약

• 관련법규 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

제1항 5호 및 재무과 수의계약제도 개선계획【재무과-13795(2017.3.17.)】

에 의거 추정가격이 1천5백만원 이하의 용역계약

• 견적참가자격 : 건축사법 제23조(건축사사무소개설신고 등)에 의거 국토교통부

장관에게 건축사사무소의 개설신고를 한 자

― 기술용역 타당성 심사(기술심사담당관) 후 용역발주

◯ 본공사 : 당직실(가설건축물) 확장 공사 발주

― 소요예산 : *********

• ***********************************

• 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물

일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

― 계약방법 : 전자공개 수의계약

• 관련법규 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항

5호 건설산업기본법에 따른 건설공사로서 추정가격 2억원 이하인 공사

• 입찰참가자격 : 건설산업기본법 제9조에 의한 종합공사를 시공하는 업종 중

건축공사업 또는 토목건축공사업 등록을 필한 업체

□ 추진일정

◯ 2018. 9.  3. ~ 9. 14.     건설기술용역 타당성 심사

◯ 2018. 9. 15. ~ 9. 21.     설계용역 발주 및 계약

◯ 2018. 9. 22. ~ 10.31.    설계용역 착수 및 완료

◯ 2018. 11. 1. ~ 11. 9.     건축공사 발주 및 계약

◯ 2018. 11.10. ~ 12.31.    건축공사 착공 및 준공

붙임 : 1. 설계용역 설계내역서 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. 터널 및 지하차도 통합관제시스템 확충 계획 1부.  끝.