문서번호	환경과-3499
결재일자	2018.9.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		환경과장	총무부장
한미라		최동주	09/03 박기용
협 조
	총무과장			박병현

- 한강공원 화장실 제조 구매 -

납품기한 연기 보고(2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9

한강사업본부

(환 경 과)

- 한강공원 화장실 제조 구매 -

납품기한 연기 보고(2차)

부상형화장실을 설치함에 있어 부상시설과 화장실 제조를 분리 발주 추진 중으로, 부상시설 제작 추진이 지연됨에 따라 화장실 납품  기한을 연기하고자 함

□ 물품개요

❍ 계 약 명 : 한강공원 화장실 제조구매

❍ 납품기한 : 2018. 7. 15.  (1차 납품연기: 2018. 9. 10)

❍ *******************

❍ *********************

□ 남품기한 연기

❍ 연기사유

- 부상형화장실을 설치함에 있어 부상시설과 화장실 제조를 분리발주 추진중으로, 부상시설 계약추진이 지연됨에 따라 1차 연기하였으나 계약체결 이후 폭염, 태풍, 홍수로 인해 제작 추진이 지연되어 화장실 제조 납품기간 연기

******************************

************************************************

******************************

***********************************************

********************

❍ 준공기한

- 당초 : 2018. 7. 15.  (1차 변경 : 2018. 9. 10)

- 변경 : 2018. 10. 5.

□ 향후계획

❍ 2018. 9.   : 납품기한 연장 의뢰

❍ 2018. 10. : 납품 준공