문서번호	급수운영과-13412
결재일자	2018.9.3.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
이승우		09/03 박희철
협 조
	주무관		代박철호
	주무관		강희창
	주무관		제영도
	주무관		김진성

설계변경(1차) 심의위원회 개최 계획

「2018년 강남구 관내 상수도시설물설치 및 소화전 보수공사」

2018. 9.

강남수도사업소(급수운영과)

설계변경(1차) 심의위원회 개최

「2018년 강남구 관내 상수도시설물 및 소화전보수공사(장기계속)」에 대하여 사업소 자체 설계변경 심의 위원회를 개최하여 설계변경 시행코자 함

□ 설계변경 현황

❍ 공 사 명 : 2018년 강남구 관내 상수도시설물 및 소화전보수공사(장기계속)

❍ 공사개요

- 당초 : 노후밸브정비 410개소, 소화전정비 50개소, 기타 113개소

- 변경 : 노후밸브정비 410개소, 소화전정비 50개소, 기타 113개소

❍ 계약기간 : 2018.05.21 ~ 2019.06.30

❍ 도 급 비 : 금815,145,500원(변경 없음)

❍ 도 급 자 : ㈜진성기업 대표 정종태

□ 심의위원회 개최

❍ 심의위원장 : 급수운영과장

❍ 심의위원 : 급수운영과 시설6급 김진성, 시설7급 제영도

시설관리과 시설6급 강희창, 시설6급 정연준,

❍ 개최일시 및 장소

- 일시 : 2018. 9. 3(월) 14 : 00

- 장소 : 급수운영과 사무실

□ 심의내용

❍ 계약물량 증감 및 제경비 적정산정 여부 등 기타 설계변경 사항

- 물량변동의 적정성 여부

- 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

- 신규공정 적정산정 여부

붙임 : 설계변경(1차) 요약 보고

설계변경(1차) 요약 보고

□ 공 사 현 황

❍ 공 사 명 : 2018년 강남구 관내 상수도시설물설치 및 소화전보수공사(장기계속)

❍ 공사개요 : 제수밸브정비 410개소, 소화전정비 50개소, 기타 113개소

❍ 계약기간 : 2018.05.21 ~ 2019.06.30

❍ 도 급 비 : 금815,145,500원(변경없음)

❍ 도 급 자 : ㈜진성기업  대표 정종태

□ 변경사유

❍ 시공물량 증ㆍ감에 따른 계약물량 조정

- 물량증가 : 되메우기(기계100%)보통 공정 61등

- 물량감소 : 아스팔트절단(100~150mm) 공정 321등

- 제경비 조정 : 물량 증ㆍ감에 따른 금액변경 18개 항목 발생

❍ 신규공정에 따른 계약물량 조정

- 신규공정 : kp죠인트관 접합공(80mm적용)등 29개공정

설계변경 내역                                      (단위 : 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증ㆍ감
도 급 비	815,145,500	815,145,500	-
공 급 가 액	741,041,364	741,041,364	-
부가 가치세	74,104,136	74,104,136	-

붙임 : 설계변경 내역서 및 설계변경 사전심의 요청서 1부.  끝.