위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	13차 작업지시 일부공종 취소 요청(한강교량일상유지보수공사-2공구)

1. 교량안전과-12804(2018.7.19.)호와 관련입니다.

2. 우리시와 공사 계약 체결하여 시행중인 “2018년 한강교량 일상유지보수공사

(연간단가)-2공구”13차 작업지시(가양대교) 중 일부공종에 대하여 아래와 같이

작업 취소 요청하오니 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 13차 작업지시 일부공종 취소 현황

1) 연번 13-2 : 콘크롤 스프링 교체 162개소

2) 연번 13-3 : 슬라이딩 스프링 및 베어링 교체 120조

나. 사유 : 공사비 부족

붙  임   작업지시(일부공종 취소) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	한강교량보수공사건설사업관리용역책임기술자 이용성 귀하,동보진흥건설(주) 대표 김광웅 귀하
주무관	임승민		특수교량팀장	정준용		교량안전과장	09/03 代박동욱
협조자	주무관	백운경
시행	교량안전과-15451	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 2층 교량안전과 (서소문동)	/
전화	02-2133-1954	/전송	02-2133-1429	/		/	대시민공개