투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	납품기한 재연기에 따른 계약 기간 변경 의뢰(한강공원 화장실 제조 구매)

우리과에서 추진하고 있는 「한강공원 화장실 제조 구매」를 아래와 같이 납품기한을 재연기하고자 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 계 약 명 : 한강공원 화장실 제조 구매

2. 납품기한 : 2018. 9. 10.

3. 수   량 : 3동

4.********************

5.************

6. 납품기한 연기

- 당    초 : 2018. 7. 15

- 1차 변경 : 2018. 9. 10.

- 2차 변경 : 2018. 10. 5.

붙임 납품기한 연기보고(2차) 1부.  끝.

	환경과장
주무관	한미라		환경과장	09/03 최동주
협조자
시행	환경과-3505	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02)3780-0785	/전송	02)3780-0791	/	hmr0405@seoul.go.kr	/	부분공개(7)