문서번호	시설관리과-2269
결재일자	2018.9.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	총무과장		시설부장
김영후	한흥태	박병현		09/03 전영주
협 조

용역 설계변경 시행보고

한강교량과 한강공원 연결 승강기 설치공사 실시설계용역(정산)

2018. 09.

시  설  부

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

용역 설계변경 시행보고

《 한강교량과 한강공원 연결 승강기 설치공사 실시설계용역(정산) 》

한강공원 접근성 향상과 교통약자 이용 불편 해소를 위해 승강기를 확충하고자 추진중인“한강교량과 한강공원 연결 승강기 설치공사 실시설계용역”에 대하여 일부 공종 정산에 따른 도급비 변경에 따라 설계변경하여 용역 추진에 만전을 기하고자 함

용 역 개 요

▢ 용 역 명 : 한강교량과 한강공원 연결 승강기 설치공사 실시설계용역

▢ 규    모

○ 승강기 및 전망데크   : 2개소       ○ 비상계단 : 3개소

○ CCTV 등 기계 및 전기 : 1식

▢ 총용역비 : 79,969천원

▢ 용역기간 : 2018.03.06. ~ 9.28

▢ 용 역 사 : ㈜진우엔지니어링코리아  김명철

변경사유 및 현황

▢ 변경 사유

○ 자문비 및 손해배상공제보험료 정산

▢ 설계변경(정산)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총용역비	79,969,000	78,792,000	△1,177,000
용 역 비	77,979,000	77,979,000	-
자 문 비	1,500,000	450,000	△1,050,000
손해보험료	490,000	363,000	△127,000

조 치 의 견

▢ 상기와 같은 내용으로 설계변경 시행하고 용역 준공에 만전을

기하고자 함.

첨   부 : 1.변경내역서(정산) 1부.

2.정산 관련서류 각 1부.   끝.