투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	서울시설공단이사장
(경유)	공사감독1처
제목	실정보고 승인 통보(2018년 한강공원 야외수영장 노후 막재 교체공사)

1. 공사감독1처-5298(2018.08.02.)호와 관련입니다.

2. 귀사에서 감독업무 대행중인 「2018년 한강공원 야외수영장 노후 막재 교체공사」실정보고 요청 건에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 설계변경시 반영하여 주시기 바라며,

3. 아울러, 보험료 및 안전관리비 등 제경비 항목도 실정산하여 설계변경을 시행하여 주시기 바랍니다.

○ 승인 내역

연번	실정보고 요청 건	검토의견	비 고
1	철제 구조물 청소 후 재도장	철제면 재도장 적용 대가수정 붓칠1회 ⇒ 롤러칠 1회 적용
2	잠원·잠실 야외수영장 탈의실 벽체 가림막 재설치	적정
3	계약 내역서 규격 오류 수정	적정

끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	박지수		기반시설과장	09/04 나철흠
협조자
시행	기반시설과-2487	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화		/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개