문서번호	시설보수과-3339
결재일자	2018.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
김기수		임영철	09/04 송만규
협 조
	주무관			김종범
	주무관			代김기수

외부전문가 합동 자체정밀점검 완료보고

〔성내5교외 7개소〕

2018. 09.

동부도로사업소

(시설보수과)

외부전문가 합동 자체정밀점검 완료보고

〔성내5교외 7개소〕

Ⅰ		점검개요

○ 대상시설물(8개소)

연번	시설명	종별	규 모		구조	설계 하중	노선명	준공년도	시설물 담당	비 고
			폭 (m)	연장 (m)
1	성내5교	법정외	30	54	RCS	DB-24	동남로	1984	김기수	㈜대상안전 강신정외 2인
2	장지2교	법정외	20	15	RCS	DB-24	약진로	1986	김기수	㈜대상안전 강신정외 2인
3	서부교	법정외	25	22	RA	DB-24	동남로	1987	김부호	㈜장맥ENG 최경엽외 2인
4	세곡3교	법정외	35	40	PSC	DB-24	밤고개길	2008	김종범	대신이엔지 이상웅외 2인
5	복정2교	법정외	53	25	RCS	DB-24	헌릉로	1994	김기수	스마트이엔씨 이상범외 2인
6	방이고가	법정외	18	71	STB	DB-24	오금로	1985	김기수	스마트이엔씨 이상범외 2인
7	일원터널	법정외	23	260	ARC	-	광평로	1993	김종범	㈜이젠리버텍 김수인외 2인
8	송파지하차도	법정외	23	400	RC-Box	DB-24	송파대로	1998	김기수	대진컨설턴트 이상웅외 2인

○ 점검기간 : 2018. 6.1 ~ 2018. 8.31.

○ 점검방법 : 시설물담담+외부전문가 합동 자체점검

Ⅱ		주요 지적사항

연번	시설명	부재명	주요 손상내용	단위	물량	보수․보강방안	비고
1	성내5교	교면포장	체수	㎡	22	유도배수시설 설치
		교각	균열(0.3mm 이상)	m	6.3	주입보수
2	장지2교	교면포장	아스콘 망상균열	㎡	108	팻칭보수
		교대	균열(0.3mm 이상)	m	4.2	주입보수
3	서부교	RC BOX	균열(0.3mm 이상)	m	3	주입보수
		교면포장	체수	ea	1	배수관 설치
4	세곡3교	교면포장	교면포장 손상	a	11.6	절삭후 덧씌우기
5	복정2교	교면포장	아스콘 망상균열	㎡	54.2	절삭후 덧씌우기
6	방이고가	신축이음	조인트 누수	m	37	교체
7	일원터널	라이닝	보수부 균열 (0.3mm 이상)	m	30.96	주입보수
		갱문	균열(0.3mm 이상)	m	4.8	주입보수
8	송파지하차도	BOX구간	망상균열 및 균열부 백대	㎡	1,410	표면처리

Ⅲ		순위별 개략공사비

(단위 : 천원)

시설명	계		1순위(단기)		2순위(중기)		3순위(장기)
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계
성내5교	21	24,118	5	7,761	9	6,623	7	7,734
장지2교	20	32,590	4	9,125	6	4,524	10	16,941
서부교	15	26,627	2	1,500	5	513	8	24,614
세곡3교	20	183,688	1	174,000	8	3,871	11	5,817
복정2교	31	46,050	12	29,195	13	10,208	6	6,647
방이고가	19	73,334	12	70,251	4	2,111	3	972
일원터널	41	202,712	10	5,462	12	10,770	19	186,480
송파지하차도	25	206,964	5	168,100	9	24,187	11	14,676

※ 세부내역은 붙임 “시설물별 개략공사비” 참조

Ⅳ		상태평가 결과

시설명	성내5교	장지2교	서부교	세곡3교	복정2교	방이고가	일원터널	송파지하 차도
등 급	B	B	B	B	B	B	B	B

Ⅴ		조치계획

○ 점검결과 주요 지적사항에 대하여 시설물 담당자가 “도로관리시스템”에 직접

입력조치하고, 자체정밀점검 보고서의 보수보강 개략공사비를 참고하여 아래와

같이 장단기 보수계획 및 향후 예산반영 등을 조치할 것.

- 청소 등 단순사항이거나 시급을 요하는 점검사항에 대하여는 ‘18년 도로시설물

일상유지보수공사(연간단가)에 작업지시하여 금년내 조치.

- 예산부족으로 정비가 곤란한 단기 및 중기에 대하여는 사안의 시급성에

따라 2019년도에 예산 반영하여 조치.

- 주의관찰을 요하는 중기 또는 장기에 대하여는 2020년 이후 검토.

○ 점검보고서 배부 : 교량안전과 1부, 도로시설과 1부, 도로관리과 1부.

Ⅵ		점검비 지급

○ 지급대상 : 외부전문가 강신정외 23인

○ 지급금액 : 48,550천원

○ 지급방법 : 외부전문가 개인별 계좌입금

○ 예산과목

- 도로시설관리, 도로시설물운영, 시설물안전점검및진단, 시설비(16,089천원)

- 교량관리, 교량시설물점검관리, 교량시설물안전점검및진단, 시설비(42,664천원)

붙 임  1. 자체정밀점검 시행계획 1부.

2. 지적사항 개략공사비 각 1부.

3. 성과품 각 5부(별도). 끝.