＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공사 변경계약 체결 보고[여과지 유출관 교체공사]

우리 센터에서 시행중인 공사 계약건에 대하여 변경계약을 체결하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 공 사 명 : 여과지 유출관 교체공사

나. 계약업체 : ㈜한진설비 대표 한광희

다. 계약변경 사항

1) 계약금액 변경

(단위 : 원)

구 분	당초금액	변경금액	증·감	비 고
계약금액	147,764,540	167,530,000	19,765,460

2) 계약기간 : 2018. 04. 17 ~ 12. 15(변동사항 없음)

3) 변경사유 : 공종별 물량 증감 및 제경비 정산

붙임  공사 변경계약서 1부.  끝.

주무관							김덕기				행정관리팀장					윤충용					광암아리수정수센터소장					09/04 윤창진
협조자
시행			행정관리팀-8768										(						)		접수												(						)
우	12989					경기도 하남시 서하남로 293 광암아리수정수센터 (광암동)																/
전화		(02)3146-5312							/전송			(02)3146-5319					/	kimdk@seoul.go.kr													/	부분공개(5)