문서번호	기술심사담당관-13533
결재일자	2018.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제178호

				시 민
주무관	기술지원팀장	기술심사담당관		행정2부시장
윤갑진	류용열	김홍길		09/05 진희선
협 조
	기술관리팀장		이상석
	토목심사팀장		조임남
	건축심사팀장		도태환

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(8월)

2018. 9.

기술심사담당관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	외부전문가 주관 점검실시
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(8월)

우리시 주요 공사현장을 대상으로 실시하고 있는「외부전문가 기동점검단」의 ’18년 8월 중 활동결과에 대하여 보고 드림

□ 점검개요

점검일자	’18. 8. 9.(목)	’18. 8. 14.(화)	’18. 8. 21.(화)	’18. 8. 28.(화)
공 사 명	고덕강일공공주택지구 6단지 아파트	국사봉배수지 건설공사	신림선 도시철도 민간투자사업(1공구)	위례지구 A1-13BL 아파트 건설공사
사업부서	서울주택도시공사	상수도사업본부 시설과	도시기반시설본부	서울주택도시공사
공사기간 (공정률)	’17.12. ~ ’20.04.(9%)	’16.12. ~ ’19.05.(64%)	’17.02. ~ ’22.02.(8%)	’17.11. ~ ’20.04.(14%)
점검자	· 보성이앤지그룹 김영민 · 성우인종합건축사무소 한효동 · 한국재난연구원 권회구 (직원 : 건축심사팀 3)	· 서영엔지니어링 윤상길 · 스마트이엔씨 이상범 · 아남이엔지 방성운 (직원 : 기술관리2)	· 비씨엠피 임경호 · 백산엔지니어링 박훈규 · N.I스틸 양철규 (직원 : 토목심사 3)	· (주)에이치엔파트너 허갑수 · (주)미공간 유병학 · 한국가설협회 김곤묵 (직원 : 건축심사팀 2)

□ 중점 점검사항

❍ 현장대리인, 책임감리원 등 근무실태

- One-PMIS에 작업일보 작성 및 현장내 장비와 인력투입현황 관리여부

- 현장반입 건설기계 임대차 계약서 작성, 대여대금 지급보증서 교부여부 확인

- 현장대리인 및 참여기술자(감리원) 현장근무 여부 확인 등

❍ 토공 및 가시설 설치상태 등 안전관리 실태

- 동바리 및 비계 설치 및 유지관리실태 점검

- 터널, 개착구간 등의 가시설 시공 및 유지관리 실태점검

❍ 구조물에 대한 품질․공정관리 등 시공관리

- 시공 상세도 등 설계도면 작성상태 및 시공계획 수립여부

- 구조물 시공 및 품질관리 상태 점검

□ 점검결과

❍ 총 지적사항

공 사 명	계	안전관리	품질관리	기 타
계	44	25	16	3
고덕강일공공주택지구 6단지 아파트	11	7	3	1
국사봉배수지 건설공사	9	4	4	1
신림선 도시철도 민간투자사업(1공구)	7	7	0	0
위례지구 A1-13BL 아파트건설공사	17	7	9	1

□ 분야별 주요 지적사항

안전관리 분야

❍ 기둥 거푸집 수평변위 방지 가설재(사보강 각파이프) 하부에 지지한 목재 안전성 재검토[고덕강일 공공주택지구 6단지 아파트 신축공사]

⇒ 사보강 각파이프의 하부 목재 지지부 안전성을 재검토하여 부족한 경우 보강 요함

❍ 위험물 저장소에 산소 및 아세틸렌통이 없고 야적장에 산재해 있는 등
위험물 보관 상태 미흡[고덕강일 공공주택지구 6단지 아파트 신축공사]

⇒ 사용하지 않는 산소 및 아세틸렌통은 위험물 저장소(정식명칭:고압가스 저
장소)에 보관 후 필요시 사용

❍ 101정거장 강관 Strut에 설치된 Strain 게이지는 외부 충격에 취약할
것으로 우려됨[신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(1공구)]

⇒ 계측기 망실 및 파손 방지를 위해 보호용 커버 설치 등을 검토

❍ 101정거장 CIP 2개소가 벌어진 것으로 판단되므로 벽체 안정성 및 차수그라우팅 기능 확인 필요[신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(1공구)]

⇒ 현장 현황을 반영한 도면으로 벽체 구조 검토 및 차수대책 마련

품질관리 분야

❍ 슬래브 누수로 인한 슬래브 철근 녹 발생 우려[고덕강일 공공주택지구 6단지 아파트 신축공사]

⇒ 균열 부위에 대하여 전수조사를 실시하여 보수·보강 조치 및 양생관리 철저

❍ 일부 벽체 철근 배근 간격 준수 미흡 및 결속선 설치 불량[국사봉배수지
건설공사]

⇒ 철근 배근 간격 조정 및 결속선 보완 후 콘크리트 타설

❍ 구조물 시공 이음부 등 재료분리 및 균열 적정 관리 필요[국사봉배수지
건설공사]

⇒ 시공 미흡부위 치핑 후 단면복구 실시, 균열 대장 작성 등 적정 관리

❍ 벽체 오픈 부위에 수직·수평 보강근이 되어 있으나 사인장 철근 미보강[위례지구 A1-13BL 아파트 건설공사]

⇒ 사인장 철근 배근에 대하여 구조설계자와 협의하여 설치 필요성 검토

❍ 주요 구조부(기둥, 보)에 이어치기 콜드조인트 발생[위례지구 A1-13BL
아파트 건설공사]

⇒ 콘크리트 타설 이어치기로 인한 콜드조인트 발생 부분 보수·보강 우선 조치. 주요 구조부에 이어치기 현상이 발생치 않도록 계획 수립 및 타설 관리 철저

□ 조치사항

❍ 지적사항은 점검 당일 시공업체 및 감리단(감독)에 전달하여 즉시
시정 요구

❍ 발주기관(부서)에 지적사항 시정 및 현장관리 철저토록 공문 통보

붙임 : 점검 주요 지적사례 1부.  끝.