문서번호	기전과-8251
결재일자	2018.9.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★전문관		기전과장	서부도로사업소장
김진종		서수일	09/05 이학구
협조

남산2호터널 긴급전화 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9.

서부도로사업소

( 기  전  과 )

남산2호터널 긴급전화 교체 계획

비상상황 발생시 터널관리소에 위급상황을 알리는 중요한 설비로서 남산2호터널에 설치된  긴급전화는 통화시 잡음발생 및 내용연수 초과한 설비로 교체하여 이용시민의 생명과 재산을 보호하고자 함.

□ 사업근거

◯ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침(국토해양부, 2016. 8. 12.)

□ 터널 긴급전화 설치현황

시 설 명	수 량	설치간견	설치년월	비 고
남산1호터널	상행 7대 하행 7대	200m	2016년
남산2호터널	상하행 9 대	〃	2001년	교체대상
남산3호터널	상행 6대 하행 6대	〃	2011년 2012년
금화터널	상행 3대 하행 3대	〃	2018년

□ 점검개요

◯ 점검일자: 사 업 명: 2018. 8. 29.(수)

◯ 점 검 자: 남산2호터널 터널근무자 정성욱외 2명

◯ 점검대상: 남산2호터널에설치된 긴급전화기(9대) 및 선로, 주장치 등

□ 점검결과 및  조치계획

점검사항	점검결과	조치계획	비고
주 장 치	정상작동	긴급전화는 터널 준공 당시(2001)에 설치된 것으로,긴급전화(주장치·선로·긴급전화기)가 대부분이 노후되어 성능 및 호완성 향상을 위하여 긴급전화 일체를 교체코자 함
긴급전화기	송수신 시 잡음 정도가 매우심함
선 로	노후됨

□ 예산과목

◯ 예산과목

안전총괄본부 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리(도시개발특별회계),

도로터널 노후 방재설비 보수, 시설비 및 부대비, 시설비

◯ 소요예산: 약4,000만원

□ 입찰참가자격 및 계약방법

◯ 입찰참가자격: 정보통신공사업법 제14조에 따라 정보통신공사업을 등록한

업체로서, 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 주된 영업소 소재지가 서울특별시에 있는 업체

◯ 계약방법: 전자공개수의계약

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항

제5호 가목(추정가격이 8천만원이하인 공사에 대한 계약)

□ 추진계획

◯ 2018. 9.: 시행계획서 첨부 예산 재배정 요청

◯ 2018. 9.: 발주품의

◯ 2018. 9.: 전자공개수의계약

◯ 2018. 9.: 계약 및 착공

◯ 2018. 10.: 시험운전 및 준공

붙임  남산2호터널 긴급전화 교체공사 설계도서 1부.  끝.