투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(중랑캠핑숲 물놀이장 주변 정비공사)

1. 시설과-4062(2018.9.4.)호와 관련입니다.

2. 『중랑캠핑숲 물놀이장 주변 정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 중랑캠핑숲 물놀이장 주변 정비공사

나. 공사기간 : 2018. 8. 20. ~ 2018. 9. 8.

다. 도 급 비 : 금45,000,000원(금사천오백만원)

라. 도 급 자 : ㈜대종원종합개발 대표 전창숙

마. 변경금액 (증3,428,000원)

구 분		도 급 비 (원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
도급비	공 급 가 액	40,909,091	44,025,455	3,116,364
	부가가치세	4,090,909	4,402,545	311,636
	합 계	45,000,000	48,428,000	3,428,000

바. 예산과목 : 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원

보수정비사업, 남산 및 산하공원 시설물 보수정비, 시설비

붙 임    1) 설계변경 검토보고서 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.

조경팀장	이무림		시설과장	09/05 김재균
협조자	재무팀장	代전정아
시행	시설과-4071	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 4층(예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5966	/전송	02-3783-5969	/		/	부분공개(5)