문서번호	도시철도토목부-10736
결재일자	2018.9.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
유원하		방영복	09/05 정대현
협조
	주무관		김성옥

『지하철9호선 3단계 918공구 건설공사』

가로등 변경 실정보고에 대한 검토보고

2018. 9.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사」

가로등 변경 실정보고에 대한 검토보고

「서울지하철9호선 3단계 918공구 건설공사」도로복구(가로등 변경)  책임감리원 실정보고에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		사업개요

❍ 공 사 명: 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사

❍ 위    치: 서울시 송파구 잠실동 아시아 선수촌~삼전동 잠실병원

❍ 규    모: 총연장 1,290.7m(정거장 1개소, 본선환기구 3개소)

❍ 공사기간: 2010.02.19. ~ 2018.12.31.

❍ 도 급 비: 141,345백만원

❍ 시 공 사: SK건설 외 4개사

❍ 감 리 사: (주)서영엔지니어링 외 3개사

Ⅱ		추진경위

❍ ‘18.05.24 : 도로시설물 원상복구에 계획에 따른 변경 및 추가정비 재요청(송파구 도로과→본부)

❍ ‘18.05.28 : 도로시설물 원상복구 송파구 요청사항 알림(본부→감리단)

❍ ‘18.05.31 : 가로등 좋은빛위원회 심의안건 제출(본부→도시빛정책과)

❍ ‘18.06.07 : 제20차 좋은빛위원회 심의결과 통보(도시빛정책과→본부)

❍ ‘18.06.11 : 제20차 좋은빛위원회 심의결과 통보(본부→감리단)

❍ ‘18.08.27 : 가로등 변경에 따른 실정보고(감리단→본부)

Ⅲ		보고내용

□ 가로등 설치 변경(재활용→신설)

❍ 가로등 개량(평면도)

※ 변경사유 : 송파구 요구사항(신품으로 설치, 광원은 LED등기구로 개선) 및 좋은빛위원회 심의결과 반영

□ 관련규정

❍ 입찰안내서 제3장 계약조건 (공사계약일반조건) 제21조 제4항 2호

제21조(설계변경으로 인한 계약금액조정의 제한 등)

① 정부의 책임있는 사유 또는 천재·지변 등 불가항력의 사유로 인한 경우를 제외하고는 그 계약금액을 증액할 수 없다.

④ 제1항에 정한 정부의 책임있는 사유 또는 불가항력의 사유란 다음 각호의 1의 경우를 말한다.

2. 발주기관 외에 당해공사와 관련된 인허가기관 등의 요구가 있어 이를 발주기관이 수용하는 경우

❍ 입찰안내서 제3장 계약조건 (지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건) 제19조 제2항 2호 가목

제19조(설계변경 등)

② 계약금액의 조정이 가능한 설계변경은 발주기관의 책임있는 사유 또는 천재·지변 등 불가항력의 인한 경우에 한하며, 일반조건 제21조제4항의 각호를 다음과 같이 구체적으로 규정한다.

2. 당해공사와 관련된 인허가기관 등의 요구가 있어 이를 발주기관이 수용한 경우

가. 도로부속시설물 중 유지관리부서에서 교체, 개량, 추가공사 등을 공고일 이후에 요구하여 발주기관이 추가공사를 지시한 경우

□ 변경내용

❍ 재질 및 수량

구 분	단위	당 초		변 경		비 고
		재질	수량	재질	수량
가로등 (1등,4등)	개소	CDM250W	48	LED100W(1등) LED200W(4등)	57
가로등주	ea	-	48	-	57
분전함	면	-	-	-	3

❍ 공사비

(단위 : 백만원)

공 종	당 초	변 경	증·감	비 고
직접공사비	48	269	221
제경비 외	-	69	69
총공사비	48	338	290

□ 계약금액 조정 검토

❍ 계약금액 조정(증 290백만원)

- ‘공사계약일반조건 제21조 제4항 2호’ 및 ‘지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건 제19조 제2항 2호 가목’에 의거 발주기관 외에 당해공사와 관련된 인허가기관 등의 요구가 있어 이를 발주기관이 수용하는 경우로써,

- 송파구 요구사항(신품으로 설치, 광원은 LED등기구로 개선) 및 좋은빛위원회 심의결과를 반영한 사항으로 계약금액 조정(증액)이 필요함.

❍ 단가적용

구 분	변경수량	비 고
적용기준	시공비 : 협의단가 재료비 : 신규단가

※ 단가산출

- 변경 설계단가는 2018년 전기품셈 및 자재는 조달단가 적용

- 품셈에 기술되지 않은 공정에 대하여는 송파구청 일위대가 적용

- 자재비: 100%적용, 시공비: 협의율 97.25%적용[(낙찰률94.49%+설계100%)/2]

□ 책임감리원 검토의견

○ 가로등 공사가 당초 원상복구로 설계되어 있으나 송파구청 협의결과 요구사항 반영 및 좋은빛 심의를 받아 재질 및 설치방법 등이 결정된 사항이며,

❍ ‘공사계약일반조건 제21조 제4항 2호’ 및 ‘지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건 제19조 제2항 2호 가목’에 의거 발주기관 외에 당해공사와 관련된 인허가기관 등의 요구가 있어 이를 발주기관이 수용하는 경우로써 추가공사비(증 290백만원)는 발주처 설계변경 심의를 거쳐 계약금액 조정(증액)함이 타당하다고 판단됨.

Ⅳ		조치의견

❍ 가로등 변경은 유관기관 요구사항 및 좋은빛 심의결과에 따른 반영사항으로 책임감리원 의견과 같이 승인하고,

❍ 공사비는 향후 본부 설계변경소위원회 심의를 거쳐 설계변경 조치하고, 총사업비 변경 시 반영코자 함.

※ 가로등 공사비 : 증 290백만원

붙임  책임감리원 실정보고 1부.  끝.