문서번호	급수운영과-14056
결재일자	2018.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장	강동수도사업소장
양봉우	代임인택	09/05 윤순용
협 조

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

「2018년 강동수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사」 공사 실정보고에 따른 검토 보고

2018. 9.

강동수도사업소

(급수운영과)

「2018년 강동수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사」

공사 실정보고에 따른 검토 보고

「2018년 강동수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사」위탁 감독기관인 시설관리공단으로부터 공사실정 보고서(신규공종)가 제출되어 이에 대한 검토 보고 임

※ 관련근거 : 공사감독2처-12236(2018. 8. 31),「공사실정보고서 제출」

1		공사현황

□ 공 사 명 : 2018년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사

□ 공사개요 : 아스팔트포장 361a, 보도블록포장 6a, 콘크리트포장 6a

□ 공사기간 : 2018. 4. 16.~2019. 4. 30.

□ 계약금액 : 2,140,008,000원

□ 계 약 자 : 지에스성신건설㈜  대표 박준구

2		보고내용

□ 공단 실정보고 내용

❍ 신규공종(도막형바닥재) 추가 반영 검토

- 『마천동 17외 6개소 배급수관정비공사』1구간(마천동 17~8번지) 포장복구공사 구간중 3개소 험프구간에 도막형바닥재-로드팔트(아스팔트/스텐실)가 시공되어 있어 포장공사 후 원상복구가 필요한 실정임.

- 신규공종 개요

공 종	규 격	단 위	수 량	비 고
도막형바닥재-로드팔트 (아스팔트)	스텐실	㎡	504

- 개략 공사비: 24,210천원

3		조치의견

□ 마천동 배급수관 1구간(마천동 17~8번지) 포장복구공사 구간중 3개소 험프구간에 대하여 기 시공되어 있는 도막형바닥재-로드팔트(아스팔트/스텐실)로 원상복구 조치하고 설계변경시 반영코자 하며

□ 위 사항을 공사감독기관인 시설관리공단에 통보하여 공사추진에 차질이 없도록 조치코자 함.

붙임  관련공문 1부.  끝.