＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사현장 실정보고서 검토결과 통보

1. 공사감독2처-12301(2018.9.3.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에 승인 요청한 공사현장 실정보고서에 대해 다음과 같이 통보하오니 공사         시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 보고내용 및 검토결과

구분	공종	시설공단 보고 내용	우리사업소 검토 의견
1	부단수 분기 설치건 “3·4구간”	● 3·4구간 종점부는 신설관(D150㎜)을 기존관 (D300㎜)에 정자 분기하여 연결하게 되어 있으나 단수민원 예방을 위해 부단수 분기 (D300/150) 설치 필요 - D300㎜ 관로부설 연장 감소 : 감) L=5m - 부단수분기(D300/150) 설치 : 증) 2개소 ▶ 개략공사비 : 감)1,951천원	●『타당함』 ▶ “3·4구간” 종점부를 당초 정자 분기에서 부단수 분기로 변경 시공
2	공기밸브 설치 변경 “3·4구간”	● 3구간 및 4구간 종점부에 부단수분기로 설치할 수 없는 공기밸브를 고저차가 발생하는 3구간 종점부로 이동 설치 및 4구간 종점부에 공기밸브 추가 설치 필요 - D300㎜ 관로부설 연장 감소 : 감) L=12m - 공기밸브(D100) 설치 : 증) 1개소 ▶ 개략공사비 : 감)1,453천원	●『타당함』 ▶ “3·4구간” 종점부로 공기밸브 위치변경 및 추가 설치 시공

끝.

	남부수도사업소장
주무관	김재엽		급수운영과장	09/05 代강동길
협조자
시행	급수운영과-18043	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4557	/전송	3146-4589	/	yeup2424@seoul.go.kr	/	대시민공개