문서번호	설비부-12410
결재일자	2018.9.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	열빛총괄과장
김현욱	09/06 유병기

『장지지하차도~동부간선도로간 열결로 설치공사』

설계변경 소위원회 자문요청

2018. 9.

도시기반시설본부

[설 비 부]

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		열빛총괄과	요청일		2018년 09월 일
공 사 명	장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사
공사개요	공사규모		- 진입연결로 Ramp-A L=638m, 1차로(B=6.0m) - 진출연결로 Ramp-B L=455m, 1차로(B=6.0m) - 견인차량보관소 및 탄천변 화장실
	공사기간		2017. 7. 1. ~ 2019. 9. 30.
	감 리 사		㈜동일기술공사 외 2개사
	설 계 사		㈜동일기술공사
	시 공 사		롯데건설(주)
자문 안건명			송파구 견인차량보관소 내 차단기 및 비상벨 신규설치			요청금액		증)137,000천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ☑ 유관기관 요청
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 송파구 견인차량보관소 진출입구에 차량번호인식 차단기 설치 및 견인차량보관소 내부 방범용 비상벨 신규설치 요청에 따른 설치 검토. 관련문서 : 실정보고 승인[도시기반시설본부-18-4885] 실정보고 승인 통보[동감(장지-동부) 제18-87호]
사업관리단 의견(요약) ○ 내용 : 차량번호인식 차단기 및 비상벨 신규 설치를 반영하는 것은 타당함
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당 초 : 차단기 이설(2EA) 등 - 변 경 : 차량번호인식용 차단기 및 비상벨 신설 각 1식 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 차단기 이설(2EA) 등 - 변 경 : 차단기 설치 1식 비상벨 설치 1식					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 169,500 천원 - 변 경 : 306,500 천원 - 증 감 : 증) 137,000 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 견인차량보관소 전기공사
별첨서류	1. 사업관리단 검토 의견서 1부. 2. 관련공문 1부. 3. 공사비 증·감 집계표 및 내역서 1부. 4. 실정보고 서류 1부. 5. 협약서 1부.

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사
계약금액	32,071,600 천원	계약일	2016. 12.	시공사	롯데건설(주)
공사기간	2017. 7. 1. ~ 2019. 9. 30.	낙찰률	해당없음	설계자	㈜동일기술공사
계약형태	기부채납사업			감리자	㈜동일기술공사 외 2개사
공사규모	진입연결로 Ramp-A L=638m, 1차로(B=6.0m) 진출연결로 Ramp-B L=455m, 1차로(B=6.0m) 견인차량보관소 및 탄천변화장실			※ 작성자 : 박희정 (☎ 3708-8611)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	견인차량보관소 전기공사 (차단기 이설 및 CCTV공사)		- 송파구 견인차량보관소 요청사항 반영 (차량번호인식 차단기, 방범용 비상벨 설치)
공 사 비	169,500 천원		306,500 천원	증) 137,000 천원
적 용 요 율	없 음		없 음
설계변경요구자	☑ 발주처 ☐ 계약상대자
협의율 적용 근거	해당없음
설계변경 근거	방 침	업무연락: 도시기반시설본부-18-156(2018.01.04.) 도시기반시설본부-18-1966(2018.03.05.)
	관련규정	협약서 제6조 3, 4
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 요청
설계변경 내용	송파구 견인차량보관소 차량번호인식 차단기 및 비상벨 신규 설치
효 과	① 공기단축(-월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 설치검토 요청 – 동감(장지-동부) 제18-3호(2018.01.05.)
도시기반시설본부-18-156(2018.01.04.)

· 실정보고 요청 – 동감(장지-동부) 제18-38호(2018.03.06.)
도시기반시설본부-18-1966(2018.03.05.)

· 실정보고 승인 – 동감(장지-동부) 제18-87호(2018.05.16.)
도시기반시설본부-18-4885(2018.05.15.)