＂깨끗한 당신이 청렴 성북을 만듭니다＂
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	2018년 보안등 유지보수공사(연간단가-2구역) 설계변경(2차) 시행

1. 우리구에서 시행중인 『2018년 보안등 유지보수공사(연간단가-2구역)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2차)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2018년 보안등 유지보수공사(연간단가-2구역)

나. 공사기간 : 2018. 2. 26. ~ 12. 31.

다. 도 급 자 : ㈜정도기전 대표 이재번

라. 계약금액 조정내역                                         (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감액
총 공 사 비	350,271,460	383,151,160	증) 32,879,700
도 급 비	340,271,460	373,151,160	증) 32,879,700
이 전 비	10,000,000	10,000,000	-

마. 설계변경 사유

- 석관동 한천마을 주거환경개선사업에 시행에 따른 LED등기구 교체비 설계반영(19,108천원 증액)

- 2018년 가로등・보안등 유지보수공사 낙찰차액 사용계획에 따른 낙찰차액 45,000천원 사용(증액)

- 장위동 도시재생활성화지역(13구역해제지역)내 LED보안등기구 설치완료후 도급비 잔여분 31,229천원 감액

- 현장여건에 따른 시공물량 조정

바. 예산과목 : 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 밝고 아름다운 가로환경 조성, 조명등 유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(구비: 45,000,000원 증액-낙찰차액)

도시재생디자인과, 지역균형발전, 도시재생사업 운영, 서울형 도시재생시범사업, 시설비 및 부대비, 시설비(31,229천원-잔여분감액)

도시재생본부 주거환경개선과, 평생 살고 싶은 마을만들기 추진, 주거지재생사업 추진(도정), 주거환경관리사업(도정), 시설비(401-01)(19,108천원증액)

첨 부 : 1) 설계변경사유서 1부.

2) 설계변경내역서(2구역1차) 1부.

3) 설계변경 보고서 1부.

4) 제비율검증표 1부.  끝.

주무관	곽진곤		도로조명담당	代박정재		도로과장	代이상문		안전건설교통국장	09/06 하순호
협조자	계약담당	이계웅		재무과장	김영임
시행	도로과-15359	(		)	접수		(		)
우	02848	서울시 성북구 보문로 168 성북구청	/
전화	02-2241-3593	/전송	02-2241-6552	/	bodisattva@sb.go.kr	/	대시민공개