위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약 보고(불용 보도상영업시설물 매각)

1. 성영기업 계약기간 연장요청(‘18.9.5.)과 관련입니다.

2. 쾌적한 보행환경 조성을 위해 추진하고 있는 불용결정된 보도상영업시설물 매각계약과 관련하여, **************************************을 검토 후, 아래와 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

가. 건       명 : 보도상영업시설물 매각

나. 매각 업체명 : ******************************

다. 연장요청 사유

- 작업기간 중 연일 지속된 폭염 및 태풍 등으로 작업공정 지연 (공정율 : 현재까지 94% 추진)

라. 변경계약 검토사항

- 계약일로부터 60일 이내 수거 및 처리해야 하나, 올해 유례없는 폭염 등의 사유로   계약기간 내 처리가 불가능한 타당한 사유가 인정되어 계약기간을 연장함

- 관련 근거 : 계약특수조건 제8조 제③항

“매수인”의 책임없는 사유로 인하여 계약기간 내 처리가 불가능하다고 판단될 경우 계약만료일 7일 이전까지 연장신청 가능,“매도인”의 승인을 받아 처리기간 연장 가능

마. 변경계약 현황

구 분	당 초	변 경	비 고
계약 만료일	*************	*************	20일 연장

첨 부 : 계약기간 연장 요청 공문(계약업체) 1부.  끝.

주무관	장수련		보도환경팀장	김경식		보도환경개선과장	09/06 권완택
협조자
시행	보도환경개선과-10096	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)2133-8133	/전송		/	jsuryeon@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)