문서번호	방재시설부-11725
결재일자	2018.9.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
정영미		신용우	09/07 이임섭
협조

『구 북부 법조단지 환경개선공사』

조경분야 실정사항 검토보고

2018. 9.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

『구 북부법조단지 환경개선공사』

조경분야 실정사항 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『구 북부법조단지 환경개선공사』조경분야 실정사항에 대하여 검토 및 조치계획을 보고드림.

Ⅰ		공 사 개 요

▢ 공 사 명 : 구 북부법조단지 환경개선공사

▢ 위    치 : 노원구 동일로174길 27(공릉동 622)

▢ 규    모 : 지하 1층(증축), 총사업면적 8,254㎡

❍ 조경개요

- 식  재 : 교목(은행나무 등 16종 250주), 관목(사철나무 등 19종 12,987주)

지피류(감국 등 20종 13,010본)

- 시설물 : 남무광장플랜터 등 22종

- 포  장 : 벽돌포장 등 14종

▢ 공사기간 : 2018.03.15. ～ 2019.04.20.

▢ 공 사 비 : 36억원(조경1,147백만원)

▢ 시 공 사 : ㈜지앤지종합건설/강남조경건설㈜, ㈜도원도시

▢ 감 리 사 : ㈜경호엔지니어링

Ⅱ		검 토 사 항

▢ 공사 저촉수목 설계누락

❍ 저촉 수목에 대한 선조치〔방재시설부-6080(2018.05.11.)〕 후 설계변경 반영

Ⅲ		검토결과

▢ 설계누락 저촉수목 조사 후 이식 및 제거조치

❍ 수목 이식 및 제거현황

- 존 치 : 향나무 등 8종 29주

- 이 식 : 선주목 등 2종 8주

- 제 거 : 소나무 등 9종 151주, 사철나무 등 8종 1,220주

- 가지치기 : 강전지 19주

▢ 공사비 변경

공 종 명	당 초	변 경	증 감	비고
순공사비	384,479,399	398,942,691	14,463,293
제경비	46,194,237	50,787,309	4,593,072
공급가액	430,673,636	449,730,000	19,056,364,
부가세	43,067,364	44,973,000	1,905,636
도급비	473,741,000	494,703,000	20,962,000

▢ 공사비 확보방안

❍ 조경공사 도급비 증액에 대하여는 본 공사 「구 북부법조단지 환경개선공사」 총공사비 설계변경에 반영

Ⅲ		보고자 의견

❍ 상기 검토사항에 대하여는 추후 설계 변경에 반영코자 함.

붙 임 : 1. 감리 보고서 및 변경 도서 1부

2. 지장수목 이식 및 제거현황표 1부.  끝.