문서번호	기전과-8376
결재일자	2018.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
정영술		서수일	전결 09/07 이학구
협조

2018년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가) 설계변경 보고(1차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9.

서부도로사업소

(기전과)

2018년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가) 설계변경 보고(1차)

우리사업소 관내 「2018년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)」

시행 중 연간단가 계약 물량 변동에 대해 시공 감리의 설계변경 요청이

있어 검토하고 설계 변경코자 함.

□ 관련 근거

○ 1차 설계변경(감리원) : TR-본-0904(2018. 9. 7.)호

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2018년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

○ 공사위치 : 서부도로사업소 관내(시도)

○ 공사내용 : 교통안전표지 신설·교체·철거·이설 등 1식

○ 계약금액 : 금84,100,900원

○ 공사기간 : 2018. 2. 27.∼2018. 12. 31.

○ 계약업체 : ㈜아이디포커스 대표 강우영

○ 감리업체 : ㈜트래픽스 대표 김희수

□ 검토 의견

○ 교통안전표지 관련 응답소 민원 등 처리를 위해 당초 연간단가 계약 시

산출한 물량 변경내역 반영

○ 경찰청 교통안전시설 규제에 따른 물량 변경내역 반영

□ 설계변경 내역

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감
도 급 비	84,100,900	84,100,900	변동 없음

○ 변경 내용

- 물량 변경: 당초 380→변경 626(증246)

∙ 교통안전표지 신설: 84→302(증218)

∙ 교통안전표지 교체: 82→161(증79)

∙ 교통안전표지 철거: 86→12(감74)

∙ T형 부착대 및 교차로대:50→125(증75)

∙ 철주 및 편주: 56→13(감43)

∙ 도장 및 이설 위치조정:22→13(감9)

- 물량 변경에 따른 재료비, 노무비, 제경비 등 변경

※ 설계변경 내역서(별첨)

○ 예산 과목: 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전

시설물 관리, 교통안전표지 설치 및 유지보수, 시설비(401-01)

□ 행정사항

○ 설계변경 내역에 대하여 변경 계약 요청→관리단속과

붙임 1. 설계변경서류 요청공문 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 계약금액 검증확인서 1부.  끝.