문서번호	급수운영과-22816
결재일자	2018.9.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박준기		정헌석	09/10 代김남구
협조

공사실정 검토결과 보고

(궁동 110-1~230-12번지간 송배수관 정비공사)

2018. 9.

공사실정 검토결과 보고

(궁동 110-1~230-1번지간 송배수관 정비공사)

「궁동 110-1~230-1번지간 송배수관 정비공사」의 감독기관인 서울시설공단으로부터 아래와 같이 공사실정 보고사항이 접수되어 검토결과를 보고드림

※ 서울시설공단 공사감독2처-12486 (2018. 9. 4.)

□ 공사개요

○ 공  사  명 : 궁동 110-1~230-12번지간 송배수관 정비공사

○ 공 사 기 간 : 2018. 5. 14. ~ 2018. 11. 23.

○ 공 사 개 요 : 관부설 D=200~400mm, L=826m

○ 도  급  비 : 500,636,830원

○ 계약상대자 : **************

□ 검토결과

○ 설계도면 상이

실정내용	공단 검토내용	사업소 검토내용
• 당초 도면상에는 D400mm 주철직관 부설공이 총 710m 인데, 계약내역서 상 에는 주철직관 부설공이 74m 로 수량 상이	•물량산출서와 설계도면이 상이한 부분 추가 반영 필요 (붙임 참고)	타당함 (설계반영 필요)

○ 시공 중에 신규공중 발생(16개공종)

실정내용	공단 검토내용	사업소 검토내용
• 시공 중에 신규공종 16개(사급자재 3 개 공종 포함) 공종이 발생 함. (붙임 참고)	•신규발생공종 추가 반영 필요.	타당함 (설계반영 필요)

○ 개략 공사비 :  당초 2,400천원 → 변경 36,700천원  증) 34,300천원.

□ 행정사항

○ 서울시설공단에 승인 통보

- 공사실정 검토결과 타당함에 따라 서울시설공단에 승인 통보

붙임 : 서울시설공단 관련공문 1부.  끝.