투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(남산예장자락 재생사업 통신공사)

우리 본부에서 추진중인 「남산예장자락 재생사업 통신공사」 관련 아래와 같이 준공기한 연기하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기내용

차수	계약금액	계약자	준공기한
			당초	변경
총차	*************	*******	`19.01.31	`19.12.31
금차(1차)	************		`18.11.30	변경없음

나. 연기사유 : 선행공정(토목) 공사기간 연장에 따른 준공기한 연기

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1)준공기한 연기 내부 보고서 1부.

2)준공기한 연기 합의서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	정찬교		녹색성장과장	代마동훈		설비부장	09/10 권오식
협조자
시행	설비부-12576	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8640	/전송	02-3708-8659	/	jamjaco@seoul.go.kr	/	부분공개(7)