문서번호	정보시스템담당관-11666
결재일자	2018.9.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		인공지능팀장	정보시스템담당관
김경숙		송종선	09/10 우정숙
협조

- 인공지능 기반 대화형서비스 시범사업 -

추진현황[주간]보고(9주차)

2018. 9.

정보시스템담당관

- 인공지능 기반 대화형서비스 시범사업 -

추진현황[주간]보고(9주차)

『인공지능 기반 대화형서비스 시범사업』9주차 추진 현황을 아래와 같이 보고드림.

□ 사 업 명 : 인공지능 기반 대화형서비스 시범사업

□ 추진기간 : 2018.09.03.~09.07.(9주차/전체26주)

□ 사 업 자 : ㈜와이즈넛

□ 추진실적

번호	작업 구분명	추진기간	단계	비중	금주달성율		전체 진척율
					계획	실적
1	착수단계	2018. 07. 10.∼ 07. 20.	착수	10%	****	****	***
2	분석단계	2018. 07. 16.∼ 09. 76.	분석	10%	*****	*****	*****
3	설계단계	2018. 08. 20.∼ 10. 05.	설계	25%	*****	*****	*****
4	구현단계	2018. 09. 03.∼12. 07.	구현	25%	****	****	*****
5	운영환경설정	2018. 09. 07.∼11. 02..	구현	10%	-	-	-
6	테스트 및 내부Open	2018. 10. 22..∼ 12. 07.	테스트	15%	-	-	-
7	오픈 및 완료	2018. 12. 10.∼ 12. 31.	완료	5%	-	-	-

○ 사업관리

- ************************

**********************

○ 분석단계

- 전화번호그룹 챗봇 설명회 및 설문지 작성 : 9월4일(화)

- 민원접수 자료 분석(계속) : 기존 120접수체계와 매칭 분석

- 시스템 연계 분석 : 민원접수 폼 및 연계 API

○ 설계단계

- 표준질의 답변 Set 분석 결과, 민원접수 Web 화면, 관리도구 프로세스 설계(계속)

※ 기타

- 감리 용역 사업 발주 : 과업지시서 검토 요청(9/05)

□ 주요 미결업무 및 대책

****************************************

*****************************************

*******************************중 **************************************************협의

□ 차주계획

○ 설계단계

- 표준질의 답변 Set 분석 결과, 민원접수 Web 화면, 관리도구 프로세스 설계(계속)

○ 구현단계

- 민원접수 표준질의 답변 Set 구현 진행(계속)

[붙임1] 주간업무현황보고서 1부.

[붙임2] 주간진도WBS 1부.

[붙임3] 업무분석서(민원접수) 1부.  끝.