문서번호	시설보수과-7266
결재일자	2018.9.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
이동섭		신동헌	09/10 이학구
협조
	주무관		권순회

2018년 도로시설물 세척 추가예산 확보방안

2018. 9

서부도로사업소

(시설보수과)

2018년 도로시설물 세척 추가예산 확보방안

‘18.8월말 현재 서부도로사업소 도로시설물 세척예산 집행율 99%로 하반기 시설물 세척예산 부족에 따른 추가예산 확보방안을 검토 보고 드립니다.

검토배경

○ 2017년 대비 도로시설물 세척물량 약30% 증가

- ‘17.11월 봉산터널(2종) 개통으로 타일, 방음판 등 세척물량 증가

- 남산1호터널 촬영 협조(‘18.5.4) 관련 등기구 세척물량 증가

○ 깨끗한 시설물 관리를 위한 세척 작업방법 개선

- 당초 벽체 상단부 살수작업만 실시하는 것으로 설계하였으나, 오염물질의 완전한 제거가 어렵고 얼룩이 발생하여 하단부까지 전구간 고압살수 및 인력작업 시행으로 세척물량 및 인건비 증가

○ 2018년 8월말 현재 세척예산 99% 집행

구 분	예산액	계약금액	집 행 액	예산잔액
용역비(백만원)	980,000	980,000	972,950	7,050

2018년 세척용역 개요

○ 대    상 : 64개소(터널6, 지하차도12, 교량30, 고가14, 입체교차2)

○ 기    간 : 2018. 3. 13 ~ 12. 31

○ 세척규모 : 벽체타일 280,616㎡, 콘크리트면 217,369㎡, 방음판 64,816㎡, 난간 34,202㎡ 등

○ 용역업체 : ㈜창성개발

○ 계약금액 : 980,000천원

○ 주요 추진경위

- 2018. 2월 : 2018년 도로시설물 세척용역 발주

- 2018. 3월 : 용역계약 및 착수

- 2018. 3~8월 : 도로시설물 세척 시행(총6회 작업 실시)

※ 추진실적

구 분	세척기준 (도로관리과 청결대책)	추진실적 (‘18.8월말)	비고
터 널	9회/년	6회(3∼8월)
지하차도	9회/년	2회(3월,5월)
교량·고가·입체교차	4회/년	1회(4월)

- 남산1,2,3호 등 도심지의 주요 터널은 미세먼지 저감 및 쾌적한 도로환경 조성을 위하여 매월 세척 시행하고 있으며,

- 지하차도, 교량은 시설물의 오염 상태 및 예산 등 여건을 고려하여 탄력적으로 세척 작업 추진 중임.

<터널 세척>	<지하차도 세척>	<교량 세척>

검토내용

○ ‘18.9월 추석전 가을맞이 청결대책 시행을 위한 도로시설물 전면 세척과 쾌적한 도로환경 조성을 위한 도심지 터널의 지속적인 청소 및 동절기 전 최종 세척을 통한 깨끗한 시설물 유지관리가 필요하나,

○ 그간 세척물량 추가 반영 및 작업방법 개선 시행 등으로 ‘18.8월말 현재 예산의 99%를 집행하여 하반기(’18.9월~11월) 시설물 세척예산이 부족한 실정임.

※ ‘18.9월~11월 중 세척 소요예산 산출(추정)

(단위 : 천원)

구 분	계	9월 (가을맞이)	10월	11월 (겨울대비)
소요예산	408,720	203,359	71,492	133,869

조치방안

○ 하반기(‘18.9~11월) 시설물 세척 소요예산으로 총408,720천원이 필요할 것으로 추정되며, 현재 용역비 집행잔액(7,050천원)을 반영하면 401,670천원 추가예산 확보가 필요함.

○ 현재 도로시설과와 세척예산 추가 배정을 협의 중이나 예산 여건 및 배정규모 등 종합적인 검토에 다소 시일이 소요될 것으로 판단되는 바, 추석 전까지 가을맞이 시설물 세척작업 완료를 위해 우선 도로시설물 일상유지보수(터널, 교량) 포괄예산의 낙찰차액 사용을 검토하고자 함.

- 도로시설물 일상유지보수 낙찰차액 가용액 : 278,848천원

· 터널 - 139,025천원, 교량 - 139,823천원

○ 상기 보고내용과 같이 일상유지보수 낙찰차액 일부 사용을 전제로 우선 9월 가을맞이 세척 작업지시 하고, 추후 도로시설과의 세척예산 추가 배정 규모에 따라 예산반영 및 세척물량 조정 등 설계변경 추진코자 함.

향후계획

○ ‘18. 9.12 ~ 9.20 : 가을맞이 시설물 세척 (8차작업)

- 남산3호터널은 걷자 페스티벌(9.30) 행사 지원을 위해 9.28~9.29 양일간 세척 시행

○ ‘18. 10~11월 : 도로시설물 세척작업 지속 추진.

붙임 : 2018년 세척용역 예산집행 및 추진계획 1부.  끝.