투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(2회) 시행 - (2018년 관내포장도로 굴착복구공사 - 북부)

우리사업소에서 시행중인 2018년 관내포장도로 굴착복구공사에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회) 시행코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2018년 관내포장도로 굴착복구공사 -북부

나. 공사기간 : 2018. 03. 15. ~ 2018. 12. 31.

다. 도 급 자 : 기경건설(주)  대표  강용석

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비고
총 공 사 비		2,601,000,000	2,601,000,000	-
도급비	공급가액	1,366,890,910	1,661,345,455	증) 294,454,545
	부가가치세	136,689,090	166,134,545	증) 29,445,455
	계	1,503,580,000	1,827,480,000	증) 323,900,000
관 급 비		898,580,000	574,680,000	감) 323,900,000
이 전 비		198,840,000	198,840,000	-

마. 설계변경사유 : 유관기관 복구의뢰 물량 증,감에 따른 설계변경

바. 예산과목

- 도로시설물 관리, 도로굴착복구(도로굴착복구기금), 도로굴착복구공사,

시설비 및 부대비, 시설비.

따로붙임  1. 보고서 1부.

2. 건설사업관리 설계변경 검토보고서 1부.

3. 설계변경 사유서 1부.

4. 설계변경 내역서 1부.

5. 합의각서 1부.   끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	최완		도로보수과장	代이화신		북부도로사업소장	09/10 代박대군
협조자	관리단속과장	박대군
시행	도로보수과-7652	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동)	/
전화	02-944-5430	/전송	02-945-5072	/	*********@seoul.go.kr	/	대시민공개