문서번호	시설과-8556
결재일자	2018.9.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
최이영		송병욱	09/10 이규상
협조

『본부시행 시설공사』

월간 공정보고회의 결과보고

2018. 9.

시설안전부

(시 설 과)

『본부시행 시설공사』

월간 공정보고회의 결과보고

본부에서 시행중인 「시설공사」에 대하여 현장별 공사추진 및 현안사항에 대한 공정보고회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		회 의 개 요

○ 건   명 : 시설공사 주요 추진사업 월간 공정보고회의 개최

○ 일   시 : 2018. 9. 7(금) 15:30 ~ 17:00

○ 장   소 : 상수도사업본부 4층 회의실

○ 참 석 자

- 본  부 : 시설안전부장, 시설과장, 분야별 담당 주무관

- 현  장 : 건설사업관리 책임기술자, 현장소장 등 관계자

Ⅱ		주 요 내 용

○ 2018년 예산 현황 보고 ( 사고이월 및 불용예산 포함)

○ 현장별 주요추진실적 및 계획 등 공정보고

○ 토목, 건축, 기계, 전기 등 분야별 현안사항

	<공정보고회의 전경 >

Ⅲ		회 의 결 과

○ 공통 지시사항

- 최근 발생한 상도동 유치원 붕괴사고와 관련 인근공사장 흙막이 가시설이 무너져 내려 발생한 사고로, 가시설이 설치된 국사봉배수지 건설공사, 수유6 배수지 공사현장은 육안점검 및 계측관리 지속관찰로 현장관리 철저.

- 구조물 콘크리트 시방서 규정을 준수하여 미세균열 관리를 철저히 하여 주시고 콘크리트 타설후 미세균열(헤어크랙) 발생시에는 시공전 보수, 보강을 하여 향후 누수가 나지 않도록 사전 수밀시공이 요구됨.

- 콘크리트 타설시 지수판 등을 별도 고정하여 지수판이 기울지 않도록 선형 및 수직도 유지하여 수밀하게 콘크리트 타설.

- 송,배수관 유․출입배수관이 구조물과 연결부위에 성토하중에 의한 부등침하로 누수하자가 발생하므로 관하단부 바닥 슬라브 등 보강 필요하나 이것이 하중으로도 작용할 수 있음을 고려.

○ 공사 현장별 검토내용

< 국사봉 배수지 건설공사 >

- 내년 공사 준공대비 배수지 유․출입 송,배수관 등 기전시설 시운전을 1개월 이상 시행될 수 있도록 공정관리 철저.

< 우면산 가압장 급수체계 개선공사 >

- 공사 현장이 급경사지로 이동 및 우천에 취약하므로 현재 배수로 설치 밑 토사 법면에 보완시공 및 관리하여 피해사항 발생하지 않도록 지속관리 필요.

< 수유6 배수지 건설공사 >

- 주택인근에서 시공하는 수유6배수지는 가시설에 대한 계측관리가 잘되고 있는지 점검이 필요하며, 현장 특성상 우기시 토사유출이 우려 되므로 주변 주택인근 도로로 유출되지 않도록 우천시 현장관리 중요.

< 낙산 배수지 건설공사 >

- 송수관로 부설 작업시 소음민원이 예상되므로 미진동, 무소음 공법을 검토하여 인근주민에 소음민원이 발생하지 않도록 현장관리 필요.

- 공사 진출·입구가 좁하 레미콘 타설 및 대형차량 진입시 교통신호수 등을 배치하여 안전사고 대비 관리 필요.

< 암사 배출수 시설 개량 및 증설공사>

- 정수장 지하시설물 중에는 한전 전기유입 선로 및 광케이블 등이 있어 주의해서 굴착하기 바라며 선로 파손으로 최악의 경우 정수장 운영 중단사태 등 이 발생되지 않도록 주의하여 시공.

-  1차 공사가 공기 내 마칠 수 있도록 공정관리를 철저히 하고 관급자재비 등 예산이 이월되지 않도록 예산관리 철저.

첨부 : 월간 공정보고회의 참석자 명단 1부. 끝.